문서번호	시설관리과-23843
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
강판오		김선호	12/22 고신석
협조

정산 및 준공검사 시행 검토보고

(사당로 장기사용 송배수관 정비공사)

2020. 12.

시설관리과

정산 및 준공검사 시행 검토보고

(사당로 장기사용 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행한『사당로 장기사용 송배수관 정비공사』에 대하여 책임감독기관인 서울시설공단으로부터 준공검사(감독)조서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 결과를 보고드림

※ 관련공문 : 공사감독2처-20847(2020.12.22.)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 사당로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=80~500mm, L=880m

○ 공사기간 : 2020.5.11.  ~  2020.12.19.

○ 계약금액 : ************

○ 계약상대자 : ***************

○ 감 독 자 : 서울시설공단 이가람

□ 보고내용

○『사당로 장기사용 송배수관 정비공사』의 책임감독기관인 서울시설공단으로부터 준공검사(감독)조서가 제출됨.

- 정산내용

· 계 약 금 액  : 금 863,676,000원

· 준 공 금 액  : 금 863,676,000원

· 공 사 기 간  : 2020.5.11.  ~  2020.12.19.

· 준공 검사일  : 2020년 12월 21일

○ 검토내용

- 공사 감독기관에서 제출한 『사당로 장기사용 송배수관 정비공사』에 대한 준공검사(감독)조서에 대하여 검토한 바, D=80 ~ 500mm L=880m 배급수관 정비공사가 완료되어 금회 기성금액을 계약상대자에게 지급 가능함

- 금회 지출액                                                     (단위:원)

계약금액	기 지출액 (노무비 및 선금)	금회 지출액	잔 액	비 고
863,676,000	483,384,000	380,292,000	-

· 노무비 및 장비대금 기 지출내역                                     (단위:원)

구분	총계	6월	7월	8월	9월	10월	11월
노무비	201,487,000	28,187,500	23,342,000	12,325,500	12,221,000	94,388,800	31,022,200
선금	281,897,000	281,897,000
계	483,384,000

□ 조치의견

○  서울시설공단으로부터 제출된 준공검사에 대하여 검토한 바, 적정하게 산출되어 붙임 준공검사(감독)조서와 같이 공사 준공처리코자 합니다.

- 예산과목

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 장기사용 송배수관 정비

붙임 : 1. 준공검사(감독)조서 제출 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공사진 1부.  끝.