문서번호	급수운영과-24356
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
안윤자	代안윤자	12/22 유승효
협 조

예산 확보계획(소블록 배급수관망)

2020. 12.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

예산 확보계획(소블록 배급수관망)

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진중 정비물량 증가로 인한 부족한 사업비에 대하여 예산 확보계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

*****************************************************

Ⅱ		사업개요

□ 정비목표: 11건, L=505m

□ 사 업 비: 541백만원

○ 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 소블록 배급수관망

○ 예산집행현황

(단위: 백만원)

구 분	예산액	집행금액(예정포함)			부족금액
		계	정산액	복구비 등
사업비	541	641	424	217	100

□ 추진실적(‘20. 11월말 기준)

구 분	계			단일배관 이중화			단절관 순환관망
	목표	실적	증감	목표	실적	증감	목표	실적	증감
사업비 (백만원)	541	641	▽100	71	71	-	470	570	▽100
건수 / 연장(m)	11 / 505	13 / 712	▽2 / ▽207	1	1	-	10	12	▽2 / ▽207

Ⅲ		추진상 문제점

□ 정비물량 증가로 사업비(100백만원) 부족

○ 대상 11건 중 굴착통제 등으로 정비불가 3건은 ‘21년 이후 정비예정 관로로 대체 선정하여 정비완료(▽92m)

○ 수질사고 위험이 높은 단절관이 추가 확인됨(▽115m)

Ⅳ		향후계획

○ 도급비 증가로 부족한 사업비 예산 재배정요청(사업소 ￫ 본부 누수방지과)

※ 남부수도사업소 정비물량 감소로 불용예정인 100백만원 우리 사업소 재배정임

붙임  소블록 배급수관망 개선사업 추진실적 1부. 끝.