문서번호	주거환경개선과-16347
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경사업팀장	주거환경개선과장
박상민		이동호	12/22 김장수
협조

- 서울 가꿈주택 골목길 정비사업 -

송정10길 일대 골목길 공사비 추가 재배정 계획

2020. 12.

도 시 재 생 실

(주거환경개선과)

- 서울 가꿈주택 골목길 정비사업 -

송정10길 일대 골목길 공사비 추가 재배정 계획

서울 가꿈주택 골목길 정비사업 대상지에 선정된 성동구 송정10길 일대 골목길에 대한 공사비 추가 재배정 요청이 있어 사업 추진을 위한 예산을 재배정하고자 함. ******************

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업 개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 66-15번지 일대

○ 규    모 : 길이 : 205m, 폭 : 3.5~4m, 인접주택 37동

□ 추진경위

○ ’19.09.20. : 가꿈주택 골목길 정비사업 대상지 선정

○ ’19.11.01. : 설계비 재배정**********

○ ’19.11.05. : 착수보고회 개최

○ ’19.11.25. : 설계용역 계약

○ ’20.05.27. : 설계용역 완료 보고회 개최

○ ’20.08.25. : 설계용역 준공

○ ’20.10.05. : 시범설치 공사비 재배정**********

○ ’20.11.26. : 공사 시행업체 선정**********

○ ’20.12.22. : 공사비 추가 재배정 요청

Ⅱ		재배정 계획

□ 사 업 명 : 성동구 송정10길 서울 가꿈주택 골목길 정비사업

□ 재배정액 : *********

○ 예산과목 : 도시재생실 주거환경개선과, 평생살고싶은마을만들기 추진, 주거지 재생사업 추진, 서울가꿈주택사업, 시설비

□ 재배정처 : 성동구청 도시재생과

□ 검토결과

○ 가꿈주택 골목길 정비사업 공사를 위해 340,390천원을 기 재배정 하였으나, 골목길 내 CCTV 설치 및 건축공사 설계변경에 따른 공사비 증가 등에 따른 재배정 요청 건임

○ 가꿈주택 골목길 정비사업의 원활한 진해을 위해 성동구청장에게 예산 추가 재배정코자 함

□ 주요 교부조건

○ 성동구 송정10길 서울 가꿈주택 골목길 정비사업 공사비 외의 다른 용도로 사용할 수 없음

○ 서울특별시장은 사업 수행에 필요하다고 인정할 경우 본 사업에 대한 수행명령 또는 시정명령을 할 수 있으며, 구청장은 특별한 사정이 없는 한 이에 적극적으로 응하여야 함

○ 재배정금은 집행완료 후 소정기일 내 관계증명서를 첨부하여 정산 보고하여야 함

Ⅲ		향후계획

□ ’20.12월 : 공사비 재배정 및 변경계약 시행

□ ’21. 5월 : 골목길 정비공사 준공

붙임 1. 시비재배정 교부 결정서 1부.

2. 재배정 요청 공문(성동구) 1부.  끝.