설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명 : 배출수처리시설 태양광발전시설 설치공사

신청부서명	정수시설과
작 성 자	마동훈
제출년월일	2020. 12. 23.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2020. 12. 23(수) 17:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여                     아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

정수시설과장

백상희

12/23

백상희

타당함

위    원

주무관

김수영

김수영

타당함

위    원

주무관

김영수

김영수

타당함

위    원

주무관

엄주원

엄주원

타당함

위    원

주무관

양현지

양현지

타당함

담    당

주무관

마동훈

마동훈

타당함

설계변경 사유서

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 배출수처리시설 태양광발전시설 설치공사

◯ 사업기간 : 2020. 10. 12. ~ 2020. 12. 24.

◯ 도 급 비 : 금221,648,740원

◯ 도 급 자 : ㈜태성전기통신

□ 설계변경 사유 및 내용

◯ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

◯ 설계변경 사유 : 정수시설과-3891(2020.12.23.)호

- 예산절감을 위한 간선케이블 포설경로 변경

- 계약내역서 미반영 내역 물량 반영(통신케이블)

- 안전시설 추가설치(안전휀스 및 자갈, 접지보강 등)

- 지장물 철거 설치, 미반영 폐기물처리비, 전기안전진단비 추가

◯ 공사비 변경사항

구분	도급액		증감액
	당초	변경
전기공사	221,648,740	219,211,300	감)2,437,440

◯ 주요 변경 내역

공 종	주요 변경내용	증감액	비고
*** *****	*************************	*********
*** ****	************************* ***************** **********	*********
*** ****	*	*********
*** ****	*	*********
** ****	*	**********
*** ****	*	*********
** ******	**************	*********
** ****	****************	**********
******	*************************	**********
*		*********

◯ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	56,471,745	65,720,326	증)9,248,581
	노무비	99,129,137	97,598,050	감)1,531,087
	경 비	29,494,096	16,731,967	감)12,762,129
	소 계	185,094,978	180,050,343	감)5,044,635
일반관리비		11,105,698	10,803,020	감)302,678
기타		0	3,800,000	증)3,800,000
이 윤		5,298,179	4,629,637	감)668,542
총원가		201,498,855	199,283,000	감)2,215,855
부가세		20,149,885	19,928,300	감)221,585
도급비		221,640,740	219,211,300	감)2,437,440

□ 심의사항

◯ 물량 증·감, 공종 적정성 여부

◯ 단가, 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부

붙임 : 1. 설계변경 내역서  1부

2. 검증확인서 1부.  끝.