문서번호	지역상생경제과-11509
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도농상생팀장	지역상생경제과장
백기선		이병훈	전결 12/23 박원근
협조

2차연도 서울농장 조성 중간보고

2020. 12.

경 제 정 책 실

(지역상생경제과)

2차연도 서울농장 조성 중간보고

「서울농장 조성 업무협약서(’20.5.26.)」에 따라 “서울농장 조성 종합계획”을 수립하여 2차연도 서울농장 조성사업 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

❍「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」제6조

❍「귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률」제7조

❍「서울특별시 상생교류 활성화 지원에 관한 조례」제6조

❍ 지역상생 종합계획[시장 방침(’19. 4.30.)]

❍ 2020 서울농장 조성·운영 기본계획[경제정책실장 방침(’19.11.20.)]

Ⅱ		추진 경과

❍ 2020 서울농장 조성·운영 기본계획 수립(’19.11.20.)

- 2차연도 조성대상지 4개소 내외 선정(전국 지방자치단체 공모)

- 서울농장 부지(8,000㎡ 이상) 및 시설 제공(부지: 소유 / 실습장: 소유 또는 임차)

- 서울농장 운영비 30% 이상 부담 및 해당 시‧군에서 운영

❍ 2차연도 서울농장 조성후보지 전국 지자체 공모(’20. 1.∼2.)

- 9개 시군(원주, 영월, 당진, 부여, 군산, 장수, 장흥, 남해, 함양) 신청

❍ 2차연도 서울농장 조성후보지 선정심의(’20. 3.∼4.)

❍ 2차연도 서울농장 조성예정지 4개소 선정(’20. 4. 1.)

- 4개 시군(강원도 영월군, 충남 부여군, 전북 장수군, 경남 남해군)

❍ 2차연도 서울농장 조성 업무협약 체결(’20. 5.26.)

❍ 2차연도 서울농장 조성 종합계획 수립(’20. 6.12.)

❍ 2차연도 서울농장 조성 기본계획 승인 및 시설비 교부(’20. 6.15.)

Ⅲ		조성 실적 및 계획

□ 사업기간: 2020. 6. ~ 2021. 12.까지(예정)

□ 사업 개요

구 분	영월 서울농장	부여 서울농장	장수 서울농장	남해 서울농장
위 치	무릉도원면 무릉리 365-7	장암면 정암리 347-6	장수읍 노하리 288	상주면 양아리 301-1
부지면적 (연면적)	27,693㎡ (820㎡)	9,244㎡ (736㎡)	11,376㎡ (830㎡)	10,832㎡ (915㎡)
사업예산 (서울시 지원)	1,300백만 원 (600백만 원)	1,409백만 원 (600백만 원)	2,600백만 원 (600백만 원)	2,100백만 원 (600백만 원)
주요시설	교육동(교육장, 사무실, 회의실 등), 숙소동(숙소, 다목적실), 실습장(비닐하우스, 텃밭 등), 기타부지(운동장, 조경시설 등)

□ 시설 조성계획(안)                                                (단위: ㎡)

시군	계	기본건축물			실습농장	기타부지	비고
		교육동	숙소동	부대시설
영월군	27,793	300	320	200	20,752	6,221
부여군	9,244	234	240	496	1,500	6,774
장수군	11,376	400	330	100	5,051	5,495
남해군	10,832	397	381	137	4,454	5,463

※ 시군에서 추진 중인 “기본 및 실시설계” 결과에 따라 변동될 수 있음.

□ 예산집행 실적 및 계획                                     (단위: 천 원)

시군	구분	2020년 실적			2021년 계획		집행예정 총액(A+B)
		예산액	집행액(A)	이월액	예산(안)	집행예정액(B)
영월군	영월군	400,000	-	400,000	300,000	700,000	700,000
	서울시	300,000	-	300,000	300,000	600,000	600,000
	소계	700,000	-	700,000	600,000	1,300,000	1,300,000
부여군	부여군	601,800	-	601,800	207,200	809,000	809,000
	서울시	300,000	-	300,000	300,000	600,000	600,000
	소계	901,800	-	901,800	507,200	1,409,000	1,409,000
장수군	장수군	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	서울시	300,000	-	300,000	300,000	600,000	600,000
	소계	300,000	-	300,000	2,300,000	2,600,000	2,600,000
남해군	남해군	900,000	821,632	78,368	600,000	678,368	1,500,000
	서울시	300,000	48,036	251,964	300,000	551,964	600,000
	소계	1,200,000	869,668	330,332	900,000	1,230,332	2,100,000
합계		3,101,800	869,668	2,232,132	4,307,200	6,539,332	7,409,000

□ 사업 진척상황 및 추진계획  ※ 공사 일정은 시군 사정에 따라 변동될 수 있음.

기간		적 요	공사 진척상황*
’20년	’21년		영월	부여	장수	남해
5.∼ 6.		서울농장 조성부지 매입	-	-	-	○
7.∼ 8.		건축물 정밀안전진단 및 안전점검용역 시행	-	-	-	○
8.∼12.	1.∼ 2.	사전 환경영향 및 재해영향 평가용역 시행	-	-	○	-
7.∼ 8.		기본 및 실시설계 용역 계약심사 실시	○	○	○	○
9.∼12.	1.∼ 2.	기본 및 실시설계 용역 시행	★	★	★	★
	3.∼ 4.	BF 인증 용역 시행	▽	▽	▽	▽
	3.∼ 4.	(공사/감리)계약심사 및 일상감사 실시	▽	▽	▽	▽
	3.∼ 4.	(공사/감리)입찰 공고, 적격심사 및 업체 선정	▽	▽	▽	▽
	4.∼12.	건축/전기/통신/소방 공사 시행	▽	▽	▽	▽
	4.∼12.	건축/전기/통신/소방 공사 감리용역 시행	▽	▽	▽	▽
	8.∼12.	조경공사, 운동장, 실습텃밭 조성 등	▽	▽	▽	▽
	8.∼12.	집기 및 비품 구입 등	▽	▽	▽	▽

* 공사 진척상황: ○(완료), ★(진행중), ▽(공사예정), -(해당 없음)

Ⅳ		향후 계획

❍ 서울농장 조성공사 추진	: ’21. 1.∼12.
❍ 서울농장 조성 시설비(2차) 교부	: ’21. 1.∼2.
❍ 서울농장 조성사업 결과보고	: ’21. 12. (예정)

붙임  시군 서울농장 조성공사 추진실적 및 계획(공문 포함) 각 1부.  끝.