문서번호	역사도심재생과-12480
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		다시세운관리팀장	역사도심재생과장
황동현		代서연우	12/23 김형석
협 조

「2020 다시․세운 프로젝트 주민협의체 활성화사업」

사업계획 변경신청 검토 보고

2020.12.

도시재생실

（역사도심재생과）

「2020 다시․세운 프로젝트 주민협의체 활성화사업」

사업계획 변경신청 검토 보고

2020 다시․세운 프로젝트 주민협의체 활성화사업으로 선정된 “을지로 지하보도~대림상가 지하연결통로 연결공사”의 사업계획 변경 신청이 있어 이를 검토하고 보고하고자 함.

Ⅰ	추 진 개 요

□ 추진 근거

○ 지방재정법 제 32조의 4(지방보조금의 용도외 사용금지 등)

- 지방보조사업자는 사정의 변경으로 지방보조사업의 내용 또는 경비의 배분을 변경하려면 지방자치단체장의 승인을 받아야함.

○ 2020년 주민협의체 활성화사업 지원계획(역사도심재생과-6553, `20. 6. 25.)

□ 추진 경위

○ '20. 06. 25.             : 2020년 주민협의체 활성화사업 지원계획 수립

○ '20. 07. 13. ~ 07. 28. : 입찰공고 및 재입찰공고(건축공사 및 전기공사)

○ '20. 08. 14. /  09. 03. : 건축공사 및 전기공사 계약 체결

(2회 유찰에 따른 수의계약)

○ '20. 11. 20.             : 지하실 천정에서 빗물로 인한 누수 발생

Ⅱ	사업계획 변경 및 검토결과

□ 사업개요

구 분	상세 내용	비 고
보조사업명	을지로 지하보도 ~ 대림상가 지하연결통로 연결공사
보조사업자	대림상가 관리(주)	관리범위 (지하1층 ~ 지상4층)
총 사업비	************************************************	**********
사업내용	구조물(보) 보강, 비상발전기 이설 및 벽 철거, 마감공사 등
사업기간	협약일로부터 2개월

□ 사업계획 변경

○ 사업 기간 연장 : **********************************

- 사유 : 입찰공고 결과 2회 유찰 및 공사 중 누수 발생으로 인한 사업 지연

○ 사업 내용 변경(붙임3 도면 참조)

(당초) *************************

지하층 평면도(변경전)	지하층 평면도(변경후)

(변경) *******************************

지하층 평면도(변경전)	지하층 평면도(변경후)

- 사유

․ 신설 지하연결통로 개통에 따라 대림상가 상권 활성화를 위한 상품전시공간 마련

․ 본 공사와 관련 없는 샤워실 이전 공사 제외

․ 지하실 공간 활용을 위한 창고 청소

□ 검토결과

○ 사업계획 변경 신청서 및 현장 점검을 통해 검토한 결과, 향후 지하연결통로 개통으로 상가 내 유입되는 보행량이 증가할 것으로 예상되며, 유리벽 설치로 조성되는 전시공간이 대림상가 상권 활성화에 효과적이라 판단됨.

○ 본 공사와 관련 없는 샤워실 이전 공사가 제외되는 것은 타당하며, 창고 청소 등 노후 시설물 개선을 통해 주민주도의 지속가능한 삶의 터전 마련 및 도시재생에 대한 이해도 및 호감도 증대를 기대할 수 있음.

Ⅲ	행 정 사 항

○ 서울시 보조금 통합관리시스템 사업내용 변경 등록

○ 사업계획 변경 승인통보(서울시 → 보조사업자)

붙임 : 1. 사업계획 변경 사유서 1부.

2. 사업계획서(변경) 1부.

3. 설계도면(변경) 1부.   끝.