문서번호	도로보수과-10191
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정상수		한정환	12/23 代박종윤
협조

설계변경(최종) 검토보고［2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서］

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

설계변경 검토보고 (최종)

우리 사업소에서 시행 중인『2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서』설계변경 사항을 보고 드림

1		관련근거

○ 설계변경서 제출〔2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서〕

[서우 제2020-423호(‘20.12.23.)]

2		사업개요

○ 공 사 명 : 2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

○ 공사규모 : 차선도색 및 제거, 차선 재도색

○ 공사기간 : 2020. 5. 7. ~ 2020.12.31.

○ 공 사 비 : ************

○ 도 급 자 : *******

3		설계변경 사유

○ 실 작업량 반영

구분	단위	수량			비고
		당초	변경	증·감
차 선 도 색	m	******	*******	******
차선밑그림	m	******	*******	*******
차선재도색	m	*******	******	******
차선제거	m	******	******	******
계		*******	*******	*******

4		공사비 증감 현황

(단위: 원)

구 분	설 계 변 경 금 액			비고
	당 초	변 경	증 · 감(-)
총공사비	***********	***********	***********
도 급 비	***********	***********	***********
관 급 비	***********	***********	**********

5		예산과목

1) *********************************************

2) ********************************************

6		조치계획

○ 상기 내용과 같이 건설사업관리기술자(감리)에서 검토 보고한 설계변경사항을 반영하여 설계변경 계약 후 정산 처리하고자 함.

붙임 1. 건설사업관리기술자 검토의견서(감리) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.