문서번호	건축부-22062
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김재호		차무흥	12/24 代유현수
협 조

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

실정보고에 대한 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(건축부)

『시립마포 실버케어센터 건립공사』

실정보고에 대한 검토보고

『시립마포 실버케어센터 건립공사』관련 실정보고 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

******************************************************

1		사업개요

위    치 : 서울특별시 마포구 백범로 21 (舊, 한국산업인력관리공단 )

규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 12,271㎡

(서을창업허브단지 조경공사 포함)

용    도 : 노유자시설(노인복지시설)

공사기간 : (2차)‘20.07.21. ~ ’21.01.15. (총차:‘19.04.15. ~ ’21.12.14.)

공 사 비: (2차)금3,573,000,000원 (총차:금16,316,549,000원)

시 공 사 : 혁성공영㈜, ㈜태왕이앤씨

감 리 사: ㈜유탑엔지니어링건축사사무소, ㈜아이티엠코퍼레이션건축사사무소

2		추 진 경 위

‘19. 04. 05.  : 공사계약 체결

‘19. 04. 15.  : 공사착공

‘19. 07. 25.  : 지상 지장물(기존건물 등) 철거

‘19. 10. 15.  : 지하 지장물(우오수 관로, 통신선로 등) 철거 및 이설

‘20. 05. 20.  : 토공사 완료

‘20. 07. 20.  : 1차 공사 준공

‘20. 12. 현재  : 지상3층 바닥 골조공사 등

3		실정보고 내용

관련근거

○******************************************************

실정보고 사유

○ ****************************

- ********************************************

실정보고 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
지하2층 바닥 지상1층 바닥 지상2층 바닥	- THK 80 PF보드	- THK 110 PF보드

********************

( 단위 : 원 )

구 분	당 초	변 경	비 고
***	38,752,210	56,862,820	18,110,610
***	7,737,790	10,887,180	3,149,390
****	46,490,000	67,750,000	21,260,000
*****	4,649,000	6,775,000	2,126,000
****	51,139,000	74,525,000	23,386,000
*****	0	0	0
****	51,139,000	74,525,000	증) 23,386,000

※ 신규품목 협의율 적용 (90.709%)

4		감리자 검토의견

********************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************

5		처리의견

***********************************************************.

붙 임 : 실정보고서 검토서(건설사업관리단) 1부.  끝.