문서번호	시설관리과-30707
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		김충완	12/24 김상웅
협조

‘2020년 가압장 모터펌프 수리(연간단가)’

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

중부수도사업소

시 설 관 리 과

『2020년 가압장 모터펌프 수리(연간단가계약)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

1. 사 업 명 : 2020년 가압장 모터펌프 수리(연간단가계약)

2. 안    건 : 설계변경 심의

3. 심의일시 : 2020. 12. 23(목) 09:30

4. 참 석 자 : ****************************

*******************************

5. 사업개요

-  대    상 : 가압장․증압장 등 43개소 기계설비

-  계약기간 : 2020.04.28. ~ 2021.03.31.

6. 변경내용

- 계약금액 및 계약기간 : 변동없음

구 분	총계약금액	1차수금액	2차수금액	비 고
변경전	*************	************	************	신규공정 발생 및 계약수량증감
변경후	*************	************	************

- 내역변경 : 신규공정 및 계약물량 증감(붙임“변경내역서” 참조)

- 변경사유

· 아리수올림터와 증압장의 모터펌프 수리 및 개량 물량변동이 발생 하였으며, 발주 당시 조사된 산출기초조사서 금액에 낙찰율을 적용하여 산출함.

· 공정 증감 발생에 따른 총 계약금액은 변동없음.

· 상기와 같이 변경 사항을 설계 변경시 반영하여 조치코자 함.

7. 설계변경 심의내용 : 붙임“설계변경 심의자료” 참조

8. 위원회 심의결과 : 상기 내용과 같이 설계변경 적정함

첨 부 : 1. 설계변경 심의내용

2. 심의위원 의견서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.