문서번호	기전과-7697
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		代문준호	12/24 장상규
협조
	주무관		문준호

『무지개터널 라디오재방송설비 설치공사』

설계변경 검토 보고

2020. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『무지개터널 라디오재방송설비 설치공사』

설계변경 검토 보고

『무지개터널 라디오재방송설비 설치공사』완료에 따라 제경비 정산내역을 반영하여 검토 후 설계변경 추진코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 무지개터널 라디오재방송설비 설치공사

○ 계약금액 : ************

○ 착 공 일 : 2020. 11. 05.

○ 준공기한 : 2021. 01. 03.

○ 계약업체 : ******************

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 사유 : 보험료 등 제경비 정산

- 보험료(건강, 연금, 노인장기요양보험) 및 산업안전보건관리비 증빙 서류 미제출

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
도급비	공급가액	**********	**********	*************
	부가가치세	*********	*********	**************
	합 계	**********	**********	*************

○ 세부 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 , 감	비 고
보험료	건강보험	*******	*	************
	연금보험	*********	*	************
	노인장기요양보험	******	*	*************
산업안전보건관리비		*********	*	************

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 준공 처리하고자 함

□ 향후계획

○ ’20. 12. 24. : 설계변경 시행

○ ’20. 12. 28. : 공사 준공

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.