문서번호	기전과-13577
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최재호		12/24 서수일
협 조

설계변경 검토보고

「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」

2020. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

설계변경(정산) 검토보고

「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」

「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」건의 설계변경(정산)검토 보고 임

□ 용역개요

○ 공  사  명 : 월드컵터널 재난방송설비 설치공사

○ 계약금액 : *********************************

○ 계약기간 : 2020.11.17. ~ 12.26.

○ 계약상대자 : ***************

○ 공사규모

- 관리실 내 재난방송설비 신규 설치

- 터널 내 누설동축케이블 및 동축케이블 설치

- 안테나 및 무선통신단자함 등 기타 부대시설 공사

□ 검토내용

○ 설계변경 사유 : 증빙서류 미제출로 인한 제경비 정산

*****************************

*****************************

*****************************

*****************************

*******************************

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 / 감
총 공 사 비	***********	***********	***	************
공 급 가 액	***********	***********	***	************
부가가치세	**********	**********	***	************

○ 검토결과 : 제경비 정산이 타당하고 판단되어 상기 내용에 따라 설계변경 하고자 함

□ 향후계획

○ 2020.12. : 설계변경 의뢰 및 체결

○ 2020.12. : 공사 준공

붙임  1. 계약변경 내역서	1부.   끝.