문서번호	정수과-5907
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	12/24 임정규
협조

2020년 준설토사류 위탁처리 결과 및 설계변경

2020. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2020년 준설토사류 위탁처리 결과 및 설계변경

2020년 정수처리시설 청소 시행 중 준설된 토사류를 폐기물관리법에 따라 사업장일반폐기물 처리업체에게 위탁처리 결과 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회 개최 후 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2020년 정수처리시설 준설토사류 위탁 처리 용역

○ 계획물량 : 60톤

○ 용역기간 : 2020.12.15. ~ 12.29.

○ 계약금액 : 12,038,400원

○ 용역업체 : 상록수환경(주), ㈜제이에이그린

○ 주요내용 : 사업장일반폐기물(폐여과사) 운반 및 매립

※ 폐기물분석전문기관(한국환경수도연구원)에서 시료 분석결과 사업장일반폐기물로 분석되었음.

□ 처리결과

○ 처 리 일 : 2020.12.23.(수)

○ 처 리 량 : 사업장일반폐기물(폐여과사) 44.94톤

○ 폐기물 운반 : 상록수환경(주)

○ 폐기물 처리 : ㈜제이에이그린에서 폐기물 매립 처리

○ 폐기물 전자인계서 등록 : 올바로시스템

[※ 폐기물 계량전표]

□ 설계변경 심의회 개최 결과

○ 설계변경 사유 : 폐기물 계량 결과 44.94톤으로 계약물량 15.06톤감소

○ 설계변경에 따른 계약변경 내역

계약금액	당 초	****************************
	변경후	***************************
	증․감액	***************************

○ 심의회 개최 결과

- 심의일시 : '20.12.24.(목) 10:00~10:30

- 심의위원 : 정수과장외 4명

- 심의내용 : 설계변경 내역, 제경비 산정 등 적정 여부

- 심의결과 : 원안가결

○ 조치의견 : 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

□ 행정사항

○ 계약물량 감소에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 설계변경 심의결과 의견서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 폐기물 반출 관련 사진 1부.

5. 폐기물 처리 등록 내역(올바로시스템) 3부.   끝.