문서번호	재난관리과-7709
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
김형진	배철수	代배철수		12/24 이창식
협 조
	장비회계팀장		임지혜

긴급출동신호제어시스템

(교통신호기) 설치 공사 설계변경 보고

2020. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

긴급출동신호제어시스템

(교통신호기) 설치 공사 설계변경 보고

역촌119안전센터 앞 긴급출동신호제어시스템 설치 공사 현장여건 변동으로 물량변경이 발생하고 설계변경을 하고자 함

Ⅰ			추진 근거

□ 소방행정과-12532(2020.12.08.)호 “은평소방서 역촌119안전센터 긴급출동신호제어시스템 설치 공사 계약 체결 결과 보고(통보)”

□ 재난관리과-7249(2020.12.04.)호 “긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 계획 보고”

□ 재난관리과-6975(2020.11.25.)호 “긴급출동신호제어시스템 설치 계획”

□ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-10742(2020.06.03.)호 “교통안전시설 개선 검토 결과 통보(하달)[은평서 제1차 심의(보완)]”

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제114호) 제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사 설계의 변경

Ⅱ			사업 개요

□ 사 업 명 : 은평소방서 역촌119안전센터 긴급출동신호제어시스템 설치 공사

□ 사업대상 : 역촌119안전센터 청사 앞

□ 사업내용 : 출동스위치 신설, 차량지주 및 신호등 설치

□ 공사업체 : 새한전설 주식회사(대표자 이수정, 은평구 증산로 327)

□ 공사기간 : 2020. 12. 7. ~ 2021. 1. 4.

□ 공사금액 : 금35,000,000원(금삼천오백만원)

Ⅲ			설계변경 세부내용

□ 변경사유 : 현장여건 변동으로 물량변경 발생

□ 변경내용

○ 당초 설계상 누락된 제어기 부분품 및 교통정리요원 반영

○ 안전사고 예방을 위한 가공 케이블 설치 위치 변경으로 공종 및 물량 변경

○ 은평구 도로점용 굴착·복구 허가 원인자 승인으로 인한 굴착 복구비 반영

○ 금액변동으로 간접비 차액이 발생하여 간접비 정산

□ 세부 변경내용

구분	시공(공종 및 물량) 내용	설치구분	단위	수량			증·감 금액
				당초	변경	증·감
역촌 119 안전센터	제어기 부분품(L.S.U)	신설	EA	0	2	2	41,472
	교통정리요원 배치	신설	hr	0	16	16
	신호케이블(지중 1선)	신설	m	74	99	25
	신호케이블(가공 1선)	신설	m	0	64	64
	신호케이블(가공 2선)	신설	m	92	15	-77
	신호케이블(가공 3선)	신설	m	55	40	-15
	조가선[와이어로프(6mm)]	신설	m	147	119	-28
	애자 및 밴드(전주용)	신설	EA	0	1	1
	애자 및 밴드(지주용)	신설	EA	6	5	-1
	후렉시블전선과(22C) 배관	신설	m	60	85	25
이전비	도로점용(굴착·복구) 복구비	신설	식	0	1	1	1,200,000
간접비	제경비, 일반관리비, 이윤등 간접비 정산						-1,241,472

□ 변경금액 : 총 공사금액 변동 없음

구 분		변경 전	변경 후	증·감	비고
총 공사비		35,000,000	35,000,000	0
도급비	공급가액	31,818,182	31,818,182	0
	부가가치세	3,181,818	3,181,818	0
	합계	35,000,000	35,000,000	0

□ 조치계획

○ 진행 중 공사를 설계변경하여 시행

○ 합의각서 작성, 변경계약 체결

붙임  1. 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 도면(변경 전) 1부.

4. 도면(변경 후) 1부.  끝.