코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경에 따른 변경계약(제1회) 시행계획 보고[광명사거리역 승강편의시설 설치공사(34공구)]

1. 관련근거

가. 토목2사업소-1502(’20. 02. 07.)호 「설계변경 여건보고[광명사거리역 기존구조물 기초 콘크리트 철거(34공구)]」

나. 토목2사업소-1609(’20. 02. 10.)호 「설계변경 여건보고[광명사거리역 지장물(KT) 조사 줄파기 추가 시공 건(34공구)]」

다. 토목2사업소-2083(’20. 02. 20.)호 「설계변경 여건보고[기존시설물(화단, 울타리) 철거 및 임시통행로 설치(34공구)]」

라. 토목2사업소-2359(’20. 02. 26.)호 「설계변경 여건보고[광명시 홍보디자인 스티커 설치 건(34공구)]」

마. 토목2사업소-2360(’20. 02. 26.)호 「설계변경 여건보고[광명사거리역 출입구 폐쇄관련        안내게시판 설치 건(34공구)]」

바. 토목2사업소-3334(’20. 03. 17.)호 「설계변경 여건보고[교통시설물 및 차선도색 변경 설치 건(34공구)]」

사. 토목2사업소-6351(’20. 05. 21.)호 「설계변경 여건보고[지반보강공 변경의 건(34공구)]」

아. 토목2사업소-6534(’20. 05. 25.)호 「설계변경 여건보고[기존출입구 철거 변경의 건(34구)]」

자. 토목2사업소-6737(’20. 05. 28.)호 「설계변경 여건보고[개착구간 변경의 건(34공구)]」

차. 토목2사업소-8836(’20. 07. 07.)호 「설계변경 여건보고[진입로 콘크리트 포장 설치 및 해체 건(32공구)]」

카. 토목2사업소-8918(’20. 07. 08.)호 「설계변경 여건보고[사토장 변경의 건(34공구)]」

타. 토목2사업소-9909(’20. 07. 28.)호 「설계변경 여건보고[비개착 공법 변경의 건(34공구)]」

파. 광명34공구 제 2007-08(’20. 07. 30.)호 「제 1회 설계변경 서류 제출」

하. 토목2사업소-10127((’20. 07. 31.)호 「자체 설계변경 심의 계획 보고」

갸. 토목2사업소-10294(’20. 08. 05.)호 「자체 설계변경 심의 결과보고」

2. 우리공사와 도급계약 체결하고 효림종합건설(주)에서 시공하는 「광명사거리역 승강편의시설 설치공사(34공구)」의 비개착 공법 변경 등 12건의 현장여건 변경에 따른 변경계약(제1회) 시행 계획을 붙임과 같이 보고 후 시행코자 합니다.

붙임  1. 변경계약(설계변경_제1회) 시행계획 보고(34공구) 1부.

2. 설계변경 내역서(34공구_제1회) 1부.

3. 설계변경 사유서(34공구_제1회) 1부.

4. 설계변경 동의서(34공구_제1회) 1부.

5. 설계변경 도면(34공구_제1회) 1부.

6. 설계변경 수량산출서(34공구_제1회) 1부.

7. 설계변경 구조계산서(34공구_제1회) 1부.

8. 설계변경 심사위원회 심사결과 1부.

9. 설계변경 예정공정표(34공구_제1회) 1부.

10. 관련문서 사본(계약심사결과서, 일상감사 의견서) 각 1부.  끝.

[기술본부/본부장/김석태]: 변경계약의뢰시 본문에 변경계약내용등을 포함시행하시고 관련규정에 따른 각종 수수료등을 반영하시기 바랍니다

과장		부장		P/L(파트장)		소장
본부장(의견있음)	전결 08/14
협조자	토목처 처장		기술계획처 처장
일상감사 NO 1179 / 2020.08.13. / 경영감사처 / 나윤범 / (의견첨부)
시행	토목2사업소-10824	(	2020.08.14.	)	접수		(		)
우	06693	서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-5248	/전송		/	younghoon@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
청렴으로 신뢰받고, 안전으로 보답하는 서울교통공사