문서번호	교통운영과-15822
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장교통대책팀장	교통운영과장
배정근		이유국	10/14 강진동
협조
	주무관		문예원

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  10.

교통운영과

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기

광화문광장 재구조화 계획변경 및 후속 교통절차 이행에 따른「광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역」준공기한 연기를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’19.7.29.~’20.10.31.

○ 계약금액 : 126,880,000원(금 일억이천육백팔십팔만원)

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링 대표 박승우

○ 과업 주요내용

- 교통량·신호운영·도로 기하구조 등 각종 현황 및 교통체계 문제점 조사

- 광화문광장 주변 차로·신호체계 개선, 교통안전시설 보완 등 개선안 마련

- 교통안전시설 심의, 설계 및 공사비 산출, 교통개선사업 시행지점 모니터링 등

□ 추진경과

○ ’19.7.29.     : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’19.10.~12. : 광화문광장 재구조화 관련 시민소통 공론화 과정(61회)

○ ’20.2.13.     : 시민소통 추진결과 기자간담회(부시장)

○ ’20.5. 4.     : 광화문광장 재구조화 사업계획 변경 방침

○ ’20.6.22.     : 광화문광장 재구조화 교통영향평가 심의 완료(市 주관)

○ ’20.9.22.     : 교통안전시설 심의 완료(市警 주관)

□ 준공기한 연기

○ 연기내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	’19.7.29.~’20.10.31.	’19.7.29.~’20.11.30.	(증) 1개월

※ 계약금액은 기본 및 실시설계 결과에 따라 조정

○ 연기사유

- 광화문광장 재구조화에 따른 시민소통(’19.9.~’20.4.) 결과를 수용, 시민 교통불편 최소화를 위한 광장의 배치 및 구조가 변경(’20.5.) 되었음

- 후속 교통절차인 교통영향평가(’20.6.) 및 교통안전시설 심의(’20.9.)가 완료됨에 따라 심의결과 설계반영 및 관계기관(공사부서) 협의 등을 위한 교통개선사업(TSM) 설계 용역 과업기간 부족으로 준공기한 연장이 필요함

○ 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

□ 향후계획

○ ’20.10~11. : 교통개선사업(TSM) 기본·실시설계 및 관계기관 협의

○ ’20.11.30.  : 용역 준공

붙 임 : 1. 준공(납품)기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.