문서번호	교통운영과-18029
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장교통대책팀장	교통운영과장
배정근		이유국	11/20 강진동
협조
	주무관		문예원

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

(교통운영과)

「광화문광장 주변 교통개선」관련

기본 및 실시설계 용역 설계변경 보고

광화문광장 재구조화 사업계획 확정에 따른 교통안전시설 심의결과를반영한 교통개선 기본 및 실시설계 용역에 대한 설계변경을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’19.7.29.~’20.11.30.

○ 계약금액 : 126,880천원

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링(대표 박승우)

○ 과업내용 : 광화문광장 주변 차로·신호체계 개선, 교통안전시설 보완 등 개선안 마련

□ 추진경위

○ ’19.11.~’20.2. : 지역주민 교통민원 수용한 교통개선사업 설계 시행

- 광장 조성관련 지역주민 소통(’19.7~12, 61회)을 통해 지역 교통민원 반영

○ ’20.2.13.        : 시민소통 추진결과 기자간담회(부시장)

- 광화문광장 배치·구조 변경(‘U’형→‘T’형) 등 광장 배치·구조 추진방향 발표

○ ’20.5. 4.        : 광화문광장 재구조화 사업계획 변경 확정

- 시민소통 결과를 수용하여 사직로 현행유지 및 세종대로 차로 축소 계획 확정

○ ’20.9.22.        : 교통안전시설 심의 완료(市警 주관)

- 사직공원 및 새문안로3길 등 세종대로 주변 교차로 구조 개선 및 좌회전 차로 설치 등

○ ’20.9.~          : 교통개선사업 기본 및 실시설계(관계기관 협의 등)

□ 설계변경 내역

○ 변경사유

- 광화문광장 재구조화 주민설명회(’19.7.~10.) 및 현장시장실(’19.11.) 개최시 지역주민의 교통개선에 대한 민원을 수용하여 본 설계에 반영·시행하였으며(기본설계 10, 실시설계 4)

※ (사직동) 어린이 통학로 안전 확보,  (평창동) 평면 교차로 좌회전 신설, (부암동) 집회 시위시 교통대책 등

- 또한, 시민 및 시민단체 소통(’19.9.~’20.4.) 결과를 수용한 광화문광장 배치·구조 변경계획이 최종 확정(‘U’형→‘T’형)됨에 따라

- 교통영향평가 및 교통안전시설 심의결과를 반영한 광화문광장 주변 간선도로와 생활도로의 교통개선사업에 대한 설계지점 등을 변경시행하였음.(기본설계 11, 실시설계 8)

※ (사직동) 사직공원 교차로 신설, 새문안로3길·5길 교통개선, (수송동) 종로소방서 앞 회전교차로 개선 등

○ 사업대상지 조정

- (당초) 기본설계 20개소, 실시설계 20개소, 모니터링 20개소

- (변경) 기본설계 21개소, 실시설계 12개소, 모니터링  0개소

※ 모니터링은 TSM사업(’21.3.) 이후 교통분석이 필요하여 본 과업에서 제외하고, I·A 시행효과 및 모니터링 용역(~’22. 2.)에서 시행 예정

○ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	용 역 비		증·감 내역
	당 초	변 경
총용역비	126,880,000	85,240,000	감) 41,640,000
공급가액	115,345,455	77,490,909	감) 37,854,546
부가가치세	11,534,545	7,749,091	감) 3,785,454

※ 예산과목 : 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 광화문광장 조성관련 교통대책 수립 및 교통개선, 시설비(2020-401-01)

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 설계변경 시행 및 변경계약

○ 2020. 12. : 용역 준공

붙 임 : 설계변경 내역서, 합의각서 각1부.  끝.