코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 의뢰(광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역)

1. 교통운영과-18029(2020.11.20.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 진행중인「광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역」에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : ’19.7.29. ~ ’20.11.30.

다. 계약금액 : 금126,880,000원

라. 계약업체 : ㈜도화엔지니어링

마. 변경사항 : 광화문광장 재구조화 지역주민 교통민원 수용 및 교통안전시설 심의 결과 반영에 따른 설계대상지점 등 변경

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	126,880,000	85,240,000	감) 41,640,000

바. 예산과목 : 교통운영과, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통개선, 광화문광장 조성관련 교통대책 수립 및 교통개선, 시설비(401-01)

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	배정근		광화문광장교통대책팀장	이유국		교통운영과장	11/20 강진동
협조자	주무관	문예원
시행	교통운영과-18046	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 6층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2474	/전송	02-2133-1053	/		/	부분공개(5,7)