투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

‘중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사’ 관련하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계 약 자: ***************

2. 계약일자: ’17.11.20 (3차 ’20.01.16)

3. 변경내용

구분	계약금액(천원)			계약기간		비고
	당초	변경	증감	당초	변경
총차	*********	*********	********	********* **********	********* **********	1,2차 준공
3차	*********	*********	********	******** **********	******** **********	금차

4. 변경사유: 설계변경에 따른 계약금액조정, 선행공종 지연에 따른 공기연장

5. 지체상금부과여부: 미부과

붙임: 1) 설계변경 및 공기연장 검토서 1부

2) 건설사업관리단 검토보고서(합의서 및 변경내역서 포함) 1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	12/11 이달영
협조자
시행	설비부-20134	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)