투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-강서구, 영등포구 일부) 설계변경(3회) 시행 및 계약의뢰

1. 기전과-10225호(2020.12.11.) 설계변경 보고 관련입니다.

2. 2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-강서구, 영등포구 일부)에 대하여 아래와     같이 설계변경(3회) 계약의뢰를 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-강서구, 영등포구 일부)

나. 공사기간 : 2020.3.16. ~ 2020.12.21.

다. 계약업체 : ㈜클립이엔지 대표 백정선

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	772,000,000원	749,672,000원	감)22,328,000원

마. 변경사유 : 준공을 위한 작업완료보고의 실제 시공물량 정산 및 보험료 등의 정산 감액

바. 예산과목 : 교통안전 시설물 관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서(3회) 1부.

2. 설계변경내역서(3회) 1부.

3. 계약금액조정검증확인서 1부.

4. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	공혜성		기전과장	12/11 서승완
협조자
시행	기전과-10231	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개