“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 보고 및 통보(2020년 서부수도사업소 관내 소형 수도계량기 교체공사)

현장민원과-19805(2020. 12. 8.)호 공사 계약 변경 의뢰에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고(통보) 합니다.

1. 계 약 건 명 : 2020년 서부수도사업소 관내 소형 수도계량기 교체공사 (담당 : 김종한)

2. 계 약 상 대 : 케이비알건설산업주식회사 (대표 : 구영규)

3. 변경계약일 : 2020. 12. 10.

4. 변 경 내 역

구분	계약 변경 정보		증감/비고
	당초	변경
총부기계약금액	276,394,400원	267,410,000원	감 8,984,400원
기 간 변 경	2020. 12. 10. 까지	2020. 12. 10. 까지	변동 없음

5. 변 경 사 유 :

- 현장여건 변경(폐전, 기교체, 교체장애 등)에 따른 물량 감소

- 작업차량비(공사 중 발생한 작업차량 사용비용) 누락분 반영

6. 보증서 등 추가 수납 : 감액 및 기간 불변으로 해당 없음

붙임  1. 변경 계약서 1부.

2. 계약 체결 서류 각 1부.

3. 변경계약 의뢰 공문 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	구자람		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	박달경		서부수도사업소장	12/11 이종주
협조자
시행	행정지원과-24670	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	0231463551	/전송	0231463578	/	spirit24@seoul.go.kr	/	부분공개(7)