문서번호	공원운영과-16605
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	녹지조경팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
김은희	고봉채	최석환	12/14 代최석환
협 조

월드컵공원 임목폐기물 처리용역

설 계 변 경  검 토 보 고

2020.  12.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

월드컵공원 임목폐기물 처리용역

설 계 변 경  검 토 보 고

「월드컵공원 임목폐기물 처리용역」추진 관련, 현장 여건에 따른 처리물량 변경사항이 발생하여 검토결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 월드컵공원 임목폐기물 처리용역

○ 위    치: 난지천공원

○ 기    간: ’20. 2. 21. ~ 12. 16.

○ 내    용: 임목폐기물 280ton 운반 및 처리

○ 계약금액: 금17,994,900원

○ 계 약 자: (주)그린씨앤에스 ******

□ 설계변경 개요

○ 변경사유 및 내용

구 분	변 경 내 용	사 유
폐기물 운 반	- 폐기물 운반비: 350㎥→252.70㎥	임목폐기물 개량증명서기준으로 실물량반영
폐기물 처 리	- 폐기물 처리비: 280ton→202.16ton

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
용 역 비		17,994,900	12,990,000	-5,004,900	감
도급비	공 급 가 액	16,359,000	11,809,091	-4,549,909	감
	부가가치세	1,635,900	1,180,909	-454,991	감
	계	17,994,900	12,990,000	-5,004,900	감

□ 향후계획

○ 상기 내용과 같이 현장여건을 반영한 설계변경 후 용역을 완수처리하고자 함

붙임  변경설계내역 1부.  끝.