문서번호	설비부-20196
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	12/14 이달영
협 조

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 사업 전기공사』

계약취소 및 재구매 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『남부순환로(개봉1동 사거리)평탄화 사업 전기공사』

관급자재 계약취소 및 재구매 검토 보고

본 공사 관급자재인 콘크리트 기초 및 가로등 설비의 납품기한을 준공일인 `23.12월까지 연기하고자 하였으나, 「물품 다수공급자계약 특수조건」에 따라 연기가 불가능하여 계약취소 후 재구매하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 「물품 다수공급자계약 특수조건」제26조(납품기한의 연장)제2항, 제4항

- 납품기한 2회에 한하여 연기 가능(회당 연장기간은 정상 납품기한 이내)

- 납품기한 추가 연기 필요시 납품요구 취소 후 새로운 납품요구 지시

◌ 관급자재(가로등주 외 3종) 구매취소 후 재구매 요청

- 남부 감2020-246(2020. 11. 26.)호

◌ 관급자재(가로등 콘크리트 기초) 구매취소 후 재구매 요청

- 남부 감2020-247(2020. 11. 26.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 남부순환로(개봉1동사거리) 평탄화사업 전기공사

◌ 공사위치: 남부순환로 오류 IC ~ 매봉초등학교(1.1km)

◌ 공사내용: 가로등 및 교통신호등 이설 및 설치 1식

- 주요설비: 가로등 54본, 가로등 분전반 2대 신설, 교통신호등 지주 11본, 교통신호등 28조 신설, 신호제어기 2대 설치 등

*************************************************

**************************************************************    ************************

**********************************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 관급자재 계약현황

◌ 계약건명: 가로등주 외 3종구매, 가로등 기초 구매

◌ 계약방법: 다수공급자계약

◌ 계약 세부내역

계 약 번 호 (납품요구번호)	품 명(규격)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
***************** ******************	****** ***************	*********	**********	***********
	******* **************	*	**********	*
***************** *****************	********* ********	*	*********	*
	********* ************	*	**********	*
*********** ******************	****** *************************	*******	**********	***********

□ 계약해지 및 재계약 사유

◌ 건설공사 공정에 따른 설치 예정일까지 계약연장 불가

- 「물품 다수공급자계약 특수조건」(조달청공고 제2020-206호)제26조제2항에 따라 납품기한을 2회(회당 납품기한 연장기간은 규정상 납품기한 이내)에 한하여 연기 가능

- 같은조 제4항에 따라 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 추가 연기할 필요가 있는 경우 해당 납품요구를 취소하고, 새로운 납품요구를 지시할 수 있음

- 본 공사 진행 중 집단민원 해결을 위한 보완설계 시행 등으로 선행공정(토목)이 지연됨에 따라 준공예정일이 `23.12월로 연기되어 현재 계약된 납품기한내 가로등 설비의 공사가 불가능한바, 기존계약 해지 후 재계약을 하는 것이 적정함

Ⅳ		관급자재 재구매 계획

□ 재구매 대상: 기존 계약물량(계약취소 후 재계약)

□ 재구매 방법: 조달구매(다수공급자계약)

□ 납품기한: 2023. 12. 31.

□ 재구매 세부내역

물품식별번호	품명(규격)	단위	수량	단가(원)	금액(원)	비고
********	****** ***************	*	**	*******	**********
********	******* **************	*	**	*******	*********
********	********* ********	*	**	******	*********
********	********* ************	*	**	*******	**********
********	****** *************************	*	**	*******	**********

붙임  건설사업관리기술단 공문 2부.  끝.