문서번호	교량안전과-18725
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
윤세희		위성환	12/14 代박동욱
협 조

- 2020년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역 - 설계변경(정산) 보고

2020. 12.

안전총괄실

(교량안전과)

- 2020년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역 -

설계변경(정산)보고

「2020년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역」관련, 현장여건 변동사항 등에 대하여 설계변경(정산) 후 준공 처리코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2020년 교량 수중구조물 점검(청소) 용역

○ 용역기간 : 2020.03.05. ~2020.12.18

○ 점검대상 : 광진교 등 10개 교량(수중구조물 204기)

○ 용 역 비 : 440,449천원

○ 계약업체 : ㈜보고해양개발 대표 박준석

□ 설계변경(정산)검토

○ 현장여건으로 인한 점검(청소) 우물통 수량 조정

- 내 용 : 우물통 청소(점검) 수량 감소 : 3기

- 점검(청소)물량 조정

(단위:기)

*****	****	****	***	*******
*	***	***	****
*****	**	**
****	**	**	****	***************
****	**	**	****	***************
*******	**	**
*******	**	**
*******	**	**
****	**	**	****	*******
*******	**	**	****	***************
*****	**	*	****	***************
*****	*	*

○ 수중점검 방법 현장여건 변동 등으로 인한 조정

- 정밀점검 및 인력점검 조정

(단위:개소)

*****	****			****			*******
	**	**	***	**	**	***
*	***	***	****	***	***	****
*****	**	**	*	*	**	**	*****************
****	**	*	***	*	*	*
****	**	*	***	**	**	*	한강 만․간조에 따라 점검 포인트 증가
*******	**	**	**	***	***	*
*******	**	*	***	***	***	*
*******	**	*	***	*	*	*
****	**	**	**	*	**	**	발주시 인력점검 누락(***B)
*******	**	*	***	**	**	***	우물통 1기 묻혀 청소 및 점검 불가
*****	**	*	***	*	*	*
*****	*	*	*	*	*	*

※ 인력점검 : 현장여건(지장물, 수심 낮음 등)으로 인해 수중점검팀의 점검선으로 수중촬영이 어려울 경우 수중구조물 청소 용역 업체에서 잠수부를 활용하여 인력으로  수중촬영 함.

※ 정밀점검 : 수중구조물 수중촬영 영상 분석에서 손상부위가 발견되면 수중구조물 청소 용역 업체에서 잠수부를 활용하여 손상부위에 눈금자를 대고 밀착 촬영하여 손상부의 규모 파악

- 정밀점검으로 촬영한 사진

위치:성산대교 P06B	위치:(신)한강대교 GP09A	위치:광진교 R03

○ ***********************

(단위:천원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
********	******	******	*********
******	******	******	*********
******	*****	*****	*********
****	******	******	*********
*******	*******	*******	*********
*******	*******	*******	*********
******	******	******	*********
*******	*******	*******	*********

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 설계변경(정산)시행 후 준공 처리코자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 2020년 수중구조물 점검결과 1부.

3. 인력점검 사유서 1부.  끝.