투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	「뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사」설계변경 및 계약의뢰

우리 본부에서 추진 중인 『뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 뚝섬 및 망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사

2. 공사기간: 2020.3.30. ~ 2021.11.19.

3. 공 사 비: 금66,012,600원

4. 도급업체: ㈜새재전기 대표 : 김시환

5. 변경사유: 현장여건 변동에 따른 물량 증·감

6. 변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감
		당 초	변 경
도급액	공급가액	60,011,455	68,855,455	8,844,000
	부가세	6,001,145	6,885,545	884,400
	도급비계	66,012,600	75,741,000	9,728,400

7. 예산과목: 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형)호안복원, 시설비 및 부대비, 시설비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과)

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계변경 보고서 1부.  끝.

							공원부장
주무관							현병철			공원시설과장					代박연웅					공원부장					12/15 김인숙
협조자				기획예산과장						문영일					총무과장							이상이
시행			공원시설과-5422									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과															/
전화		02-3780-0861						/전송			02-3780-0745					/	qudcjf8441@seoul.go.kr												/	부분공개(5)