투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	공사 계약연장 요청(화곡터널 비상경보설비 설치공사)

1. 기전과-10278(2020. 12. 15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『화곡터널 비상경보설비 설치공사』 계약 연장의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 건    명 : 화곡터널 비상경보설비 설치공사

나. 계 약 자 : *****************

다. 계약금액 : *******************************

라. 감리용역 계약기간 변경

*************************************

**************************************

마. 연장사유

- 소장 지시사항 이행

(동절기 기온 저하로 공사 진행시 안전관리 및 품질확보가 어려워 소내 공사 전면중단)

바. 지체상금 부과여부 : 미 부과

붙임  1. 감리용역 연장 검토보고서 1부

2. 합의각서 1부

3. 감리용역 변경 연기의뢰서 1부.  끝

	기전과장
주무관	김욱		기전과장	12/15 代김흥식
협조자	주무관	김흥식
시행	기전과-10306	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동)	/
전화	02-2657-7931	/전송	02-2657-7939	/	woogi0711@seoul.go.kr	/	부분공개(5)