투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(차집관로 준설토 운반 및 처리 용역)-최종

1. 시설보수과-7318호(2020.12.14.)와 관련, 『2020년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역』 에 대하여 다음과 같이 최종 설계변경 및 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 중랑물재생센터 차집관거 준설토 운반 및 처리용역

나. 계약기간 : 2020. 4. 23. ～ 2020. 12. 28.

다. 계약금액 : 267,080,000원

라. 계 약 자 : 삼흥산업개발 대표 염 태 욱

마. 설계변경 내역                                                (단위 : 원)

도 급 비	당초	변경	증ㆍ감	비 고
공급가액	***********	***********	***************
부가가치세	**********	**********	***************
계	***********	***********	***************

바. 변경사유 : 준설 물량 증가 당초 6,640ton, 변경 13,863ton

사. 예산과목 : <공통분야> 사업비용, 영업비용, 처리장비,  수선유지교체비, 수선유지비

붙임 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김원선		시설보수과장	12/15 임준빈
협조자
시행	시설보수과-7361	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	부분공개(7)