문서번호	기반시설과-5117
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
고준열		라철흠	12/15 전영주
협조

공사 설계변경(준공) 및 정산 보고

(2020년 반포달빛무지개분수 유지보수공사-연간단가)

2020. 12.

서울특별시 한강사업본부

(기반시설과)

『2020년 반포달빛무지개분수 유지보수공사-연간단가』

공사 설계변경(준공) 및 정산 보고

『2020년 반포달빛무지개분수 유지보수공사』와 관련하여 제경비 내역에 변동(보험료 감액)이 발생되어 아래와 같이 설계변경 및 정산 시행하고자 함

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 반포달빛무지개분수 유지보수공사(연간단가)

□ 계약금액 : 금469,667,890원 ((주)수필 대표:***)

□ 공사기간 : 2020. 03. 06 ~ 2020. 12. 31.

□ 공사내용 : 달빛무지개분수 기계·전기·통신 등 시설물 유지보수

2		계약변경 내용 및 사유

□ 변경 내용

○ 계약금액 변경 : 감 19,084,890원

- 당초 : 금469,667,890원 ⇒ 변경 : 금450,583,000원

○ 계약기간 : 변경사항 없음

□ 변경 사유: 제경비 정산

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
공사비	재료비	196,563,829	196,563,829	0	미사용 보험료 감액
	노무비	118,599,539	118,599,539	0
	경 비	59,502,827	45,270,638	-14,232,189
소 계		374,666,195	360,434,006	-14,232,189
일반관리비		22,479,971	21,626,040	-853,931
이 윤		29,824,644	27,560,864	-2,263,780
총원가		426,970,810	409,620,910	-17,349,900
부가가치세		42,697,080	40,962,090	-1,734,990
합 계		469,667,890	450,583,000	-19,084,890

○ 경비(미사용 보험료) 정산 : 감 14,232,189원

(단위: 원)

비 목		당 초	정 산	증 · 감	비고
경비	계	15,692,189	1,460,000	-14,232,189
	건강보험료	3,537,830	0	-3,537,830
	연금보험료	4,773,684	0	-4,773,684
	노인장기요양보험료	362,627	0	-362,627
	퇴직공제부금	2,436,883	660,000	-1,776,883
	산업안전보건관리비	3,631,748	800,000	-2,831,748
	환경보전비	946,417		-946,417

3		조 치 계 획

□ 제경비 정산에 따른 계약변경 및 공사 준공시행

□ 계약상대자로부터 산업안전보건관리비, 건강보험료 등 제경비 완납증명서 제출받아 검토한 결과 적정함

□ 공사 준공 시 계약상대자에게 지급 예정액 : ************

A. 준공금액	************
B. 기 지급액	************
○ 선금 지급액 ○ 노무비(3,4,5,10월) 지급액 ○ 1회 기성 지급액 ○ 2회 기성 지급액	************ *********** *********** ***********
C. 준공 시 지급 예정액(C=A-B)	***********

붙 임 1. 정산내역서 및 준공내역서           각 1부.

2. 정산(감액)합의서                      1부.

3. 고용,산재,퇴직공제부금 완납증명서  각 1부.

4. 산업안전보건관리비 사용내역        각 1부.