문서번호	거점성장추진단-17807
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
박성하	손철주	12/15 한정훈

- G밸리 개발계획 및 실시계획 수립 교통영향평가 용역 -

설계변경 및 준공기한 연기보고(2차)

2020.12.

- G밸리 개발계획 및 실시계획 수립 교통영향평가 용역 -

설계변경 및 준공기한 연기보고(2차)

코로나19 대응 2.5단계 격상으로 산업단지 심의 및 고시가 연기되고, 심의 전 사전 검토의견으로 광역 교통영향 분석 요구가 있는 바, 계약금액 조정과 준공기한 연기를 동시에 진행코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : G밸리 개발계획(변경) 및 실시계획 수립관련 교통영향평가 용역

○ 용역기간 : ′20.03.13. ~ ′20.12.31.

※ 과업 완료일 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획인가를 위한 산업단지계획 심의위원회 심의 및 지형도면고시 완료시

○ 과업범위 : G밸리 1,925천m2

(1단지 451천m2, 2단지 388천m2, 3단지 1,086천m2)

○ 과업내용 : 서울디지털산업단지(G밸리) 지구단위계획 수립에 따라, 개발 구역 및 주변지역의 교통환경조사, 교통수요 예측, 사업시행으로 인한 문제점 및 개선방안, 평가 및 대책 수립

○ 계 약 자 : ㈜청마엔지니어링   대표이사 김세철

○ 계약금액 : 금47,131,000원(금사천칠백일십삼만일천원)

□ 추진현황

○′20.01.    교통영향평가 수립 용역 추진 계획 수립

○′20.02.    용역 계약 및 착수

○′20.04.    관련부서 사전협의

○′20.07.    준공기한 연기(1차)

○′20.09.    주민공람(주민설명회) 및 관계기관 협의

○′20.11.    도시건설자문위원회 자문

□ 변경 내용

○ 설계변경 사유 : 심의위원 사전 검토의견에 따른 광역 교통영향 분석 추가 등

○ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감
금 액	47,131,000	50,000,000	증 2,869,000

○ 준공기한 연기 사유 : 코로나19 대응 2.5단계 격상으로 산업단지 심의 및 고시 연기

○ 준공기한 연기 내용

구 분	당 초	변 경	증 감
용역기간	′20.03.13. ~ ′20.12.31.	′20.03.13. ~ ′21.06.30.	증 181일

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ′20.12.15. 준공기한 연기 의뢰(재무과)

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 근거 1부.  끝.