문서번호	거점성장추진단-17802
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
박성하	손철주	12/15 한정훈

- G밸리 개발계획 및 실시계획 수립 소규모 환경영향평가 용역 -

준공기한 연기보고(2차)

2020.12.

- G밸리 개발계획 및 실시계획 수립 소규모 환경영향평가 용역 -

준공기한 연기보고(2차)

코로나19 대응 2.5단계 격상으로 산업단지 심의 및 고시가 연기됨에 따라 금액변동 없이 소규모 환경영향평가 용역 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : G밸리 개발계획 및 실시계획 수립 소규모 환경영향평가 용역

○ 용역기간 : ′20.03.13. ~ ′20.12.31.

※ 과업 완료일 : 산업단지 개발계획(변경) 및 실시계획인가를 위한 산업단지계획 심의위원회 심의 및 지형도면고시 완료시

○ 과업범위 : G밸리 1,925천m2

(1단지 451천m2, 2단지 388천m2, 3단지 1,086천m2)

○ 과업내용 : 서울디지털산업단지(G밸리) 지구단위계획 수립에 따라, 개발 구역 및 주변지역의 환경현황조사, 입지 타당성 검토, 환경에 미칠 영향의 예측, 평가 및 대책 수립

○ 계 약 자 : ㈜광장엔지니어링   대표이사 장숙자

○ 계약금액 : 금92,915,000원(금구천이백구십일만오천원)

□ 추진현황

○′20.01.    소규모 환경영향평가 수립 용역 추진 계획 수립

○′20.02.    기술용역 타당성 심사

○′20.02.    소규모 환경영향평가 용역 발주

○′20.03.    용역 계약 및 착수

○′20.07.    준공기한 연기(1차)

○′20.11.    한강유역환경청 협의 완료

□ 변경 내용

○ 준공기한 연기 사유 : 코로나19 대응 2.5단계 격상으로 산업단지 심의 및 고시 연기

○ 준공기한 연기 내용

구 분	당 초	변 경	증 감
용역기간	′20.03.13. ~ ′20.12.31.	′20.03.13. ~ ′21.06.30.	증 181일

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ′20.12.15. 준공기한 연기 의뢰(재무과)

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.