문서번호	하천관리과-17193
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하천계획팀장	하천관리과장
이석희	이승우	12/15 한유석

기성검사 검토 보고

(중랑천 생태환경 개선 및 준설마련을 위한 하상분석 용역(1차))

2020. 12.

물순환안전국

(하천관리과)

중랑천 생태환경 개선 및 준설마련을 위한 하상분석 용역(1차)

기성검사 검토 보고

우리부서에서 추진 중인「중랑천 태환경 개선 및 준설마련을 위한 하상분석 용역(1차)」에 대하여 기성검사원이 접수되어 검토 보고드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 중랑천 생태환경 개선 및 준설마련을 위한 하상분석 용역

❍ 용역기간 : ’20.06.26. ~ ’22.03.30(1차 : ’20.06.26. ~ ’21.04.30)

❍ 용역회사 : ㈜동일기술공사

❍ 용 역 비 : 434,640천원(1차 : 250,000천원)

❍ 과업내용 : 측량, 시추조사·저질시험, 하도유지관리계획 수립 등

Ⅱ		기성검토

❍ 1차 과업 중 12월 현재까지 시행한 물량에 대한 기성금 170,000천원 지급

공종(1차 물량)	계약금액(1차)	기성 1회
		공정률(%)	기성금액
합계(Ⅰ+Ⅱ)	250,000,000	68.0	170,000,000
Ⅰ.공급가액	227,272,727	68.0	154,545,455
1. 조사비	122,287,622	100.0	122,287,622
가. 측량	10,518,768	100.0	10,518,768
나. 시추(38개소)	111,768,854	100.0	111,768,854
2. 하도유지관리	28,415,070	40.4	11,497,658
3. 직접경비	28,168,933	0.0	0
가. 저질시험	19,437,787	0.0	0
나. 바지선	7,731,146	0.0	0
다. 자문비	1,000,000	0.0	0
4.제경비	38,880,126	46.2	17,965,818
5.기술료	9,520,976	29.3	2,794,357
Ⅱ.부가가치세	22,727,273	68.0	15,454,545

Ⅲ		향후계획

❍ ’20. 12. : 기성 처리

❍ ’21. 01.~06. : 저질시험 분석 완료 및 중랑천 홍수방지 종합계획 연계

붙 임 : 기성신청 관련 공문 각 1부.  끝.