문서번호	시설보수과-7446
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	12/16 정훈모
협조
	주무관		이석근

설계변경 및 준공기한 연기보고

(소화조 내부 보수공사, 소화조 정밀점검 및 실시설계용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

설계변경 및 준공기한 연기보고

(소화조 내부 보수공사, 소화조 정밀점검 및 실시설계용역)

우리센터에서 시행중인 “소화조 내부 보수공사”와 관련 공단의 설계변경 및 준공기한 연기 보고건에 대하여 아래와 같이 조치하고자 함

Ⅰ		관련근거

○ 설계변경 검토보고서 제출[서울시설공단 공사감독2처-20328(2020.12.15.)]

○ 준공기한 연기 검토보고서 제출[서울시설공단 공사감독2처-20408(2020.12.16.)]

Ⅱ		설계변경

○ 공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

ㆍ공사기간 : 2020.10.19. ~ 2020.12.31.

ㆍ도 급 자 : ㈜한국방재기술  대표 안태상

ㆍ도 급 비 : 1,073,344,000원

ㆍ공사개요 : 단면보수 1,493㎡, 표면처리 3,117㎡, 부대공 1식

○ 보고내용

ㆍ설계변경사유 : 시공물량 증·감

ㆍ주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증ㆍ감
단면보수	t=30mm	㎥	502.6	-	감502.6	제2처리장 9조
단면보수	t=50mm	㎡	990.6	629.5	감361.1	제3처리장 B-1-1
단면보수	t=120mm	㎡	-	361.1	증361.1	제3처리장 B-1-1

ㆍ설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		1,073,344,000	961,037,000	감112,307,000
도급비	공급가액	975,767,273	873,670,000	감102,097,273
	부가가치세	97,576,727	87,367,000	감 10,209,727
	계	1,073,344,000	961,037,000	감112,307,000

○ 조치의견 : 상기 내용 등에 대하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

Ⅲ		준공기한 연기

○ 사업현황

ㆍ공 사 명 : 소화조 내부 보수공사

- 공사기간 : 2020.10.19. ~ 2020.12.31.

- 도 급 자 : ㈜한국방재기술  대표 안태상

- 도 급 비 : 1,073,344,000원

- 공사개요 : 단면보수 1,493㎡, 표면처리 3,117㎡, 부대공 1식

ㆍ용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2020.3.30. ~ 2020.12.31.

- 도 급 자 : (사)대한산업안전협회

- 도 급 비 : 38,920,000원

- 용역개요 : 소화조 2개소, 저류조 4개소

○ 공단 보고내용

ㆍ동절기 온도 저하(일 평균기온 5℃)로 인한 작업 불가

ㆍ현장 조사에 따른 추가 작업 발생

- 당초 : 단면복구 t=50mm(990.6㎡)

- 변경 : 단면복구 t=50mm(629.5㎡), t=120mm(361.1㎡)

ㆍ검토의견

- 동절기 온도 저하와 신규 공종으로 인해 발생된 추가 일수 만큼 준공기한을 연기하여 품질확보 및 공정관리에 만전을 기하는 것이 타당하다고 판단됨

- 준공기한 연기

당초 2020.10.19. ~ 2020.12.31. ⇒ 변경 2020.10.19. ~ 2021.3.31.

- 귀책사유 : 도급사 책임사유 없음

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 조치의견

ㆍ“소화조 내부 보수공사” 시행 중 신규공종 추가와 최근 급격한 온도저하로 공사시행시 품질확보가 어려움에 따라 준공기한을 연기하여 품질확보 및 공정관리에 만전을 기하고하 하며

ㆍ상기 공사 진행 및 완료 후 점검을 시행하여야 하는 “소화조 정밀점검 및 실시설계용역”도 불가피하게 연기가 필요함에 따라 아래와 같이 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

- 준공기한 연기 : 당초 2020.12.31. ⇒ 변경 2021.3.31.

ㆍ지체상금 부과여부 : 미부과

ㆍ연기사유 : 동절기 급격한 온도저하로 공사시행시 품질확보가 어려움에 따른 절대공기 부족

첨부  1. 공단 설계변경 관련서류 1부.

2. 공단 준공기한연기 관련서류 1부.  끝.