“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차)및 차수별 부기금액 변경시행에 따른 계약의뢰 (2020년 강남,서초구관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행중인『2020년 강남·서초구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 계약물량 증·감 및 신규 공종이 발생함에 따라 아래와 같이 설계변경(2차) 및 차수별 부기금액을 변경 시행코자 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명: 2020년 강남·서초구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자: ***************

다. 계약기간: 2020.06.01 ~ 2021.06.30.

라. 변경금액 : 변동없음

(단위 : 원)

구분	설계변경 금액
	당 초	변 경	증,감
도 급 비	1,725,604,450	1,725,604,450	-

마. 차수별 부기금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액
총부기금액	1,725,604,450	1,725,604,450
1차 부기금액	1,035,362,670	1,138,588,000	증)103,225,330
2차 부기금액	690,241,780	587,016,450	감)103,225,330

바. 설계변경 사유: 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종 발생,차수별 부기금액

공 종	당초	변경	증․감	비고
아스팔트포장	76.10a	79.08a	증2.98a
아스팔트포장깨기	180㎥	151㎥	감29㎥
아스팔트표층	148.40a	214.40a	증66a

사. 하자기간: 준공검사일로부터 2년

아. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 수선유지비,

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설(신설) 보수, 시설비

붙임: 설계변경 및 심의결과 관련문서 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	손창기		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	12/16 최춘근
협조자
시행	급수운영과-19531	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4847	/전송	02-3146-4889	/		/	부분공개(5)