문서번호	정수과-3477
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김용식		代장호	12/16 신동호
협조	정수시설과장		백상희
	주무관		장호

본부발족 30년, 수돗물 통수 111년, “ 믿고 마시는 아리수”

「2020년 정수처리시설 청소용역」

정수시설 청소 완료 보고(하반기)

2020. 12.

강북아리수정수센터

(정수과)

「2020년 정수처리시설 청소용역」

하반기 정수시설 청소 완료 보고

우리 정수센터에서 시행 중인 『2020년 정수처리시설 청소용역』 추진 관련하여 하반기 청소를 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

정수처리시설 청소용역 시행계획(정수과-133, 2020. 1.14.)

2019년 하반기 정수시설 청소 추진계획(정수과-2360, 2020. 8.21.)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2020년 정수처리시설 청소용역

용역업체 : 칠갑공영(대표자 이정현)

용역기간 : 2020.02.21 ～ 2020.12.25

용 역 비 : 금253,253,240원

청소물량

□ 주벽청소 276,033㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 3,178㎥, 상징수 이송 2회

청소횟수

□ 년 1회 : 정수지

□ 년 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 회수조

활성탄흡착지,농축조,건물내․외부 청소,오존접촉조

□ 년 2회 : 배출수지,배슬러지지

Ⅲ		추진결과

하반기 청소결과 : 연간 공정율 대비 56%중 청소 완료(하반기 44%)

※ 계약금액 및 공정별 여건에 따라 청소물량 조정

청소대상(하반기)

□ 하반기 용역기간 : 2020.9.4. ～ 2020.12.25

□ 작업지시 내역

- 주벽 청소 : 129,893㎡

- 침전슬러지 청소(응집지) 3,138㎥, 농축슬러지 청소(배출수처리장) 1,050㎥

- 정수지 청소 : 주벽 16,673㎡, 바닥 15,080㎡

- 농축조 상등수 이송(4지) : 작업취소

- 침전지 상등수 이송(24회) : 2회

청소완료 현황

□ 하반기 용역기간 : 2020.9.4. ～ 2020.12.03.

□ 청소완료 내용

- 응집지(24지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거

- 침전지(24지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소

- 여과지(56지) 1회 : 주벽

- 배출수지(4지) 2회, 배슬러지지(2지)1회, 회수조(2지), 각 1회

- 정수지(4지) 1회 : 주벽, 바닥 청소

□ 청소변경 내용

△ 증가물량

- 응집지(24지) 슬러지량 : 730㎥→3,138㎥ ,탁도증가로 슬러지량 증가

- 슬러지(농축) 슬러지량 : 786㎥→1,478㎥ ,          “

- 침전지웨어 : 17,212㎥→21,515㎥ , 기온상승으로 조류증가

△ 감소물량

- 농축조 청소 : 겨울철 동결 및 방류수 수질문제, 태양광 작업으로 취소

- 활성탄흡착지 : 깔따구 유입 방지 및 방축망으로 작업 취소

청소세부내역

구 분		단위	작 업 물 량(하반기)			증감사유
공종	구조물구분		계획	준공	증감
주벽	침 전 지	㎡	61,178	61,178	-
	응 집 지	㎡	28,375	28,375	-
	침전지웨어	㎡	17,212	21,515	-4,303	추가 작업 1.5회 실시
	침전지수로	㎡	2,185	2,185	-
	여 과 지	㎡	10,287	10,287	-
	배출수지	㎡	3,536	3,536
	배슬러지지	㎡	2,646	1,323	-	1지 감소(1회물량:1,323㎡)
	회 수 조	㎡	1,494	1,494	-
	1차 농축조	㎡	3,485	0	-3,485	작업취소
	2차 농축조	㎡	1,271	0	-1,271	작업취소
	활성탄흡착지	㎡	8,838	0	-8,838	작업취소
	소 계	㎡	140,507	129,893	-17,897

구 분		단위	작 업 물 량(2차)			증감사유
공종	구조물구분		계획	준공	증감
정수지	주벽	㎡	16,673	16,673	-
	바닥	㎡	15,080	15,080	-
	소 계	㎡	31,753	31,753
응집지 (침전 슬러지)	유입수로	㎥	59	118	59	슬러지량 증가
	응 집 지	㎥	671	3,020	2349	슬러지량 증가
	소 계	㎡	730	3,138
농축 슬러지	배출수지	㎥	285	428	143	슬러지량 증가
	배슬러지지	㎥	210	1,050	840	슬러지량 증가
	1차 농축조	㎥	576	0	-576	작업취소
	2차 농축조	㎥	152	0	-152	작업취소
	소 계	㎡	1,223	1,478	-
상징수 이송	농축조 (4지)	회	1		-1	작업취소
	침전지(24지)		1	1
	소 계	㎡	2	1	-1
건물내부 청소	여과지동	㎡	19,736	19,736
	활성탄흡착지	㎡	15,248	15,248
	소 계	㎡	34,984	34,984	-

Ⅳ		행정사항

2020년 하반기 정수처리시설 청소 완료

□ 하반기 작업지시서에 따라 주벽 및 슬러지 청소 실시

□ 현장여건에 맞게 작업물량 변경하여 해당 물량을 청소 완료하였기에

당초 계약금액 범위 내에서 정산처리

청소용역 정산 설계변경 및 변경계약 실시

□ 작업물량 증가에 따른 정산 및 사후정산 대상 보험료(국민건강보험, 국민연금보험, 노인장기요양보험) 납입 증빙서류 확인 후 정산 설계변경 시행

□ 정산 설계변경에 따른 변경계약 및 준공 처리

붙임 :  1. 정산완료내역서 각 1부.

2. 청소 사진자료 1부

3. 청소작업완료표 1부

4. 하반기 시행계획서 1부 끝.