문서번호	체육정책과-13800
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	장애인체육팀장	체육정책과장
손경이	양윤희	12/17 이창현

산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장) 계약변경계획

2020. 12.

관광체육국

(체육정책과)

산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장)

계약변경계획

『산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장)』점검통로 설치 및 등반패널 방염처리 등의 이행을 위하여 계약기간을 연장하고자 함

□ 공사개요

○ 용 역 명 : 산악문화체험센터 전시·체험시설 설치공사(암장)

○ 계약기간 : ’20. 10. 6.~ 12. 26.

○ 계약금액 : 금750,197,000원(금칠억오천일십구만칠천원)

○ 계약업체 : ㈜다우조경(대표 : 김규정)

○ 과업내용 : 등반패널 조립, 홀드셋팅, 오트빌레이, 스피드월 설치 등

□ 계약변경 사유

○ 점검통로 설치에 따른 설계변경으로 인한 공사 지연

○ 실내 합판등반패널의 방염성능 허가를 받기 위한 방염업체 선정 및 이에 따른 공사 지연

○ 市와 계약상대자(다우조경)가 상호 만족하는 수준의 결과물 도출을 위해 추가적인 시간이 필요하다는 의견에 상호합의

□ 계약변경 내용

○ 계약기간 변경(계약금액 및 과업내용은 변동 없음)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약금액	금750,197,000원	좌 동	변동사항 없음
계약기간	’20. 10. 6.~12. 26. (착공일로부터 80일)	’20. 10. 6.~’21. 1. 25. (착공일로부터 110일)	계약기간 30일 연장

○ 귀책소재 : 서울시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 관련근거 :『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제13장 공사계약 일반조건, 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 2. 계약기간의 연장

□ 행정사항

○ 용역 계약변경 의뢰(체육정책과 → 재무과) : ’20. 12. 17.

○ 준    공     : ’21. 1. 25.

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.