문서번호	시설관리과-29986
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
이연한		유세종	12/17 김상웅
협 조

설계변경 심의위원회개최 결과 보고

(2020년 월곡대배수지등 18개소 항청소용역)

2020. 12.

중부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의자료

가. 용역명 : 2020년 월곡대배수지 등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2020.12.17.(목) 10:00

라. 참석자 : 시설관리과장, 6급 유세종, 6급 이유찬, 6급 김종수, 6급 박장진, 6급 이훈재

마. 용역개요 :

공 종	규 격	단위	수 량		비 고 (증․감)
			당 초	변 경
배수지 항청소	바닥,천정,벽면	㎡	148,066	148,066	-

바. 용역기간 : 2020. 04. 01 ~ 2020. 12. 31

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
용역비 (VAT포함)	154,260,100원	137,096,000원	감) 17,164,100원

※ 세정제 미사용 및 건강, 국민연금 및 노인장기요양 보험료 실정산에 따른 변경

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 용역 현황

가. 용역명 : 2020년 월곡대배수지 등 18개소 항청소 용역(단가계약)

나. 용역개요 :

공 종	규 격	단위	수 량		비 고 (증․감)
			당 초	변 경
배수지 항청소	바닥,천정,벽면	㎡	148,066	148,066	-

다. 용역기간 : 2020. 04. 01 ~ 2020. 12. 31

라. 수 급 인 : (주)씨앤씨에스에스 대표 임지현

2. 설계변경 사유보고

가. 용역중 세정제 미사용 및 제경비 등 변경 사항 발생

- 물량증․감 없음

- 세정제 미사용 및 기타 제경비(건강,국민연근,노인장기요양보험료) 실정산

3. 설계변경 검토결과

가. 세정제 미사용 및 제경비(건강,국민연금,노인장기요양보험료) 실 정산에 따른 감액

나. 물량변경 없음

붙 임: 설계변경 심의위원회 의견서 및 내역서등 1부.  끝.