투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(소화조 정밀점검 및 실시설계 용역)

1. 우리 센터에서 시행하고 있는 『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』건에 대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

- ***************************

- 용역기간 : 2020. 3. 30. ~ 2020. 12. 31.

- *******************

나. 준공기한

- 당 초 :  2020. 3. 30. ~ 2020. 12. 31.

- 변 경 :  2020. 3. 30. ~ 2021.  3. 31.

다. 연기사유 : 동절기 급격한 온도저하로 소화조 내부공사 시행시 품질확보가 어려움에 따른 절대공기 부족

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 보고서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김민호		시설보수과장	12/17 임준빈
협조자	주무관	이석근
시행	시설보수과-7492	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(7)