문서번호	도로보수과-12720
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	12/17 김영철
협 조
	주무관			이상하

『‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

2020. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)』

설계변경(1회) 검토보고

우리사업소에서 시행하는 『‘20/’21 제설작업 용역(장기계속)』과 관련하여 1차분 비상 실근무에 따른 설계변경을 검토하고 결과를 보고함

□ 추진근거

○ 2020년 제설대책 추진 예산 재배정

- 도로관리과-831(‘20.01.14.)호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ’20/‘21년 제설작업 용역(장기계속)-서부

○ 용역기간 : 2020.11.13. ~ 12.31.

○ 용 역 사 : ***********

○ 총용역비 : **************

- ****************

- ****************

□ 설계변경 검토 보고

○ ‘19/’20 제설작업 용역(장기계속) 예산집행 현황(예산배정액 : 350,000천원)

(단위 : 천원)

용 역 명	지출품의액	원인행위액 (도급비)	낙찰차액	비고
******************** ****	*******	*******	******

○ 설계변경 내역

- 주요공정 및 수량 변경 내역

공종	규격	단위	변경내역				비고
			당초	변경	증ㆍ감
상황반장	주간	hr	62.0	132.0	증	70.0
	야간	hr	44.0	24.0	감	20.0
상황대기원	야간	일	47.0	47.0	-
제설작업원	주간	hr	112.0	132.0	증	20.0
	야간	hr	88.0	48.0	감	40.0
제설작업운전원	주간	hr	247.0	284.0	증	37.0
	야간	hr	153.0	88.0	감	65.0
제설장비 상시대기	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	106.0	37.5	감	68.5
제설작업	굴삭기 (0.6[eqn: m ^{3}])	hr	18.0	26.5	증	8.5
덤프트럭(월임대)유류비		hr	117.0	72.0	감	45.0
덤프트럭 월임대	15톤 덤프	월	1.5	1.5	-

- 설계변경 금액

(단위 : 천원)

공 사 명	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총 용 역 비	***********	***********	*
총 차 분	***********	***********	*
1 차 분	***********	***********	***********
2 차 분	***********	***********	***********

○ 설계변경 사유

- 비상 실근무 반영에 따른 1차분 물량 증ㆍ감

‣ 제설용역 1차분 비상 실근무 ‘20.12.15.(화)까지 반영

□ 조치계획

○ 기상에 따른 비상근무는 예측이 곤란하여 ‘20.12.16.(수)부터 발생하는 제설작업 용역비는 2020년도 2차분에 포함하여 정산조치 하고자 함.

붙임 1. 설계변경 내역서 2부(총차분, 1차분).

2. 작업일보 1부(별첨).  끝.