“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	[암사2정수 탈수설비 개량 전기공사,정보통신공사]설계변경 시행 및 변경계약의뢰

1. 기전설비과-11868호(2020.12.18.) 관련입니다.

2. 암사정수센터 탈수설비 개량 전기공사 및 정보통신공사의 설계변경을 시행하오니 변경계약 해주시기 바랍니다.

가. 변경대상 : 암사 2정수 탈수설비 개량 전기공사 및 정보통신공사

나. 변경사유 : 암사 탈수기동 자체 방수공사, 거리두기 2.5단기 격상 등

다. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비

라. 변경내역

건 명	암사2정수 탈수설비 개량 전기공사		암사2정수 탈수설비 개량 정보통신공사
구 분	당초	변경	당초	변경
계약기간	’20.11.26.∼’20.12.31.	’20.11.26.∼’21.1.29.	’20.11.26.∼’20.12.31.	’20.11.26.∼’21.1.29.
계약금액	52,290,610원	85,930,000원 (증) 33,639,390원	61,172,790원	(변동없음)

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부

2. 설계변경 심의결과 2부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 설계변경 합의서 2부.  끝.

	생산부장
주무관	김인준		기전설비과장	代김인준		생산부장	12/18 서대훈
협조자	주무관	채창옥		예산팀장	홍경숙
시행	기전설비과-11912	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)