문서번호	하천관리과-17357
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하천계획팀장	하천관리과장
임승민	이승우	12/18 한유석

기성검사 검토 보고

(홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역)

2020. 12.

물순환안전국

〔하천관리과〕

〔홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역)

기성검사 검토 보고

우리부서에서 추진 중인「홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 기성검사원이 접수되어 검토 보고드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 홍제천 상류 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역

❍ 용역기간 : ’20. 05. 20. ~ ’20. 12. 31.

❍ 용역회사 : 동부엔지니어링 외 1

❍ 용 역 비 : 214,543천원

❍ 과업내용 : 주변 등산로와 연계한 보행축 및 쉼터․볼거리 조성 등에                 대한 기본 및 실시설계

Ⅱ		기성검토

❍ 과업 중 12월 현재까지 시행한 물량에 대한 기성금 108,960천원 지급

공 종	계약금액	기성 1회
		공정률(%)	기성금액
합 계	214,543,000	50.8	108,960,000
Ⅰ.공급가액	195,543,000	50.8	99,054,545
1. 기본및실시설계	118,423,000	78.0	92,368,545
2. 전기설계	8,571,818	78.0	6,686,000
3. 직접경비	67,497,470	0.0	-
가. 조감도	3,000,000	0.0	-
나. 인쇄비	1,497,470	0.0	-
다. MP운영비	63,000,000	0.0	-
4. 손해배상공제료	548,000	0.0	-
Ⅱ.부가가치세	19,503,909	50.8	9,905,455

Ⅲ		향후계획

❍ ’20.12. : 기성 처리

❍ ’20.12.~’21.03. : 의견수렴, 전문가 자문 및 용역 준공

붙 임 : 기성신청 관련 공문 각 1부.  끝.