문서번호	시설보수과-10232
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영현		오재섭	12/18 고영준
협 조
	주무관			오광준
	주무관			이영택
	주무관			김권수
	주무관			송준행

정밀안전진단용역 완료보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역)

2020. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

정밀안전진단용역 완료보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역)

2020년 우리 사업소에서 시행한 『정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역』에 대한 용역 완료 보고 드림

□ 시설물 현황

시설물명	구조형식	연장(m)	폭(m)	등급	준공년도	비고
정릉천2복개구조물	BOX 및 라멘	2,466	20.4~39.3	B	1962년 1979~2004년	1종

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 정릉천2 복개구조물 정밀안전진단 용역

○ 규    모 : 정릉천2 복개구조물(B=20.4~56.55m, L=2,466m)

○ 용역기간 : 2020. 3. 16. ~  2020. 12. 10.

○ 계약금액 : 401,018,000원

○ 용역업체 : (재)한국재난연구원, 미승씨앤씨검사(주)

□ 추진경위

○ 2020. 03. 16. : 용역착수

○ 2020. 04. 22. : 착수보고(서면)

○ 2020. 04.~08. : 외관조사 및 재료시험 등 시행

○ 2020. 08. 18. : 중간보고

○ 2020. 09. 22. : 설계변경 및 준공기한 연기

○ 2020. 10. 15. : 최종보고

○ 2020. 11. 26. : 건설기술심의(조건부)

○ 2020. 12. 09. : 준공계 접수

□ 용역결과

○ 결과 요약

구분	주요 점검결과	상태등급
BOX구간	∙ 균열(폭 0.3㎜미만) 및 백태, 균열(폭 0.3㎜이상), 박리, 박락, 재료분리, 층분리, 철근노출, 침식 및 철근노출, 신축이음부 누수, 격벽철거구간 H빔부식, 토사 및 이물질퇴적	b
라멘구간	∙ 균열 (폭 0.3㎜미만) 및 백태, 균열 (폭 0.3㎜이상), 박리, 박락, 재료분리, 층분리, 철근노출, 신축이음부 누수, 토사 및 이물질퇴적, 교각하단부 침식, 받침부식	b
횡단교량	∙ 균열 (폭 0.3㎜미만)∙ 박리, 박락, 철근노출, 받침부식, 단부콘크리트 마감불량	b
교면포장	∙ 포장균열, 포장소성변형, 패임, 포트홀, 체수, 박스구간 균열, 백태 집중구간 (Sta. 1180~1250)	b
신축이음	∙ 구스조인트 균열(라멘구간), 구스조인트 파손(라멘구간), 신축이음 하부 누수, 신축이음 미시공	b

○ 주요 손상 사진

벽체 철근노출 (BOX 구간)	바닥 침식(철근노출) (BOX 구간)	바닥 침식(t=30mm) (BOX 구간)	균열 (폭 0.3mm이상) (라멘구간)

○ 시설물별 점검 결과 : 종합평가 결과『B등급』(중대결함 없음)

- 상태평가(외관조사 및 내구성조사) : B등급

- 안전성평가(재하시험 및 구조해석) : A등급

- 콘크리트 품질 양호, 염화물함유량시험 대체적으로 양호

- 내진성능평가(선택과업) : 라멘구간 일부 NG

○ 시설물별 손상내용 : ※세부사항은 붙임 참조 (시설물별 개략공사비 포함)

- 구조적으로 중대한 결함사항은 없으나, 노후 및 손상된 시설물에 대한

보수 필요

□ 조치 계획

○ 상기 용역 결과에 따라 노후, 손상된 시설물에 대하여 공용성 증대를 위해「도로시설물 보수보강우선순위 선정기준(도로시설과, 2014)」에 의거 예산범위 내에서 우선순위에 따라 보수, 보강 조치코자 함.

○ 금번 선택과업으로 실시한 내진성능평가 결과 라멘구간 일부 내진성능 부족에 대하여는 정릉천 복원화사업 추진일정 등을 종합적으로 검토하여 사업추진하고자 함.

○『정릉천 2복개시설물 정밀안전진단용역』에 대해 준공 처리

○ ‘20.12월 중 시설물관리스템(FMS) 정밀점검결과 시스템 입력

붙 임 : 1. 시설물별 손상 및 개략공사비 1부.

2. 주요 시설물별 손상 사진 1부.  끝.