코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 요청(한남대교 보수공사)

우리 부서에서 시행중인「한남대교 보수공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개   요

○ 계약건명 : 한남대교 보수공사

○ 계약일자 : 2018. 3.22.

○ 준공기한 : 2020.12.22.

○ 계약상대자 : ㈜ 미래씨앤알 외 1

나. 설계변경 내역

○ 전체(총괄 3회 변경)

(단위:원)

구 분	******	*****	*********	비고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	*************
관 급 비	***********	***********	**************
이 전 비	***********	**********	*************

○ 금회(3차 1회 변경)

(단위:원)

구 분	******	*****	*********	비고
총공사비	*************	*************	**************
도 급 비	*************	*************	*************
관 급 비	**********	**********	**************
이 전 비	***********	*********	*************

다. 설계변경 사유

○ 추가공사 발생 및 실제 시공수량에 따른 수량 변경 등

라. 예산과목

○ 재난관리기금 재난계정, 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난예방, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 감리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 검증 확인서 1부.

4. 합의각서 각 1부.

5. 관련 방침서 1부. 끝.

							교량안전과장
주무관							이상문			강구조교량팀장					박찬규					교량안전과장					12/18 代박동욱
협조자
시행			교량안전과-19068									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2133-1964						/전송								/													/	부분공개(5)