문서번호	정수시설과-3797
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		代김수영	12/18 신동호
협 조
	주무관			김금옥

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

기계설비 보수공사(장기계속계약)

2차 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

강북아리수정수센터

기계설비 보수공사(장기계속계약)

2차 설계변경 시행 보고

우리 정수센터 기계설비 효율적인 유지보수를 위한 보수공사(장기계속계약) 시행 중 신규 공종 추가사항 발생 건에 대해 아래와 같이 설계변경 시행 정산코자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2020도 강북아리수정수센터 기계설비 보수공사(장기계속계약)

◯ 사업기간 : 총차 2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31

(금차 2020. 4. 1 ~ 2020. 12. 31)

◯ 계약금액 : 총차 금246,738,930원(금차 금220,220,130원)

◯ 계 약 자 : 에이치알티에스(주) 대표 이은실

◯ 정비공사 계약 내역

- 모터펌프 및 배수펌프 수리 1식

- 배관재 보수 및 밸브류 정비 1식

- 정수장 내 기타 기계설비 정비 1식

- 정수장 및 배출수처리장 각종 기기도장 1식 등

□ 작업지시 현황

◯ 1차 작업지시(2020. 4. 15)

- 배슬러지 이송관 에어밴트 설치 외 5건

◯ 2차 작업지시(2020. 7. 10)

- PAC약품저장탱크 퇴수배관 교체 및 1,2계열 약품투입 이젝터     구내용수배관 교체 외 10건

◯ 3차 작업지시(2020. 9. 16)

- 여과지동 출입문 에어커튼 설치 외 8건

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 주요 공종 추가 내역

◯ 1차 설계변경(작업지시 1, 2)

공 종	재료비	노무비	경비	계	작업지시
1. 배슬러지 이송관 에어벤트 설치	1,190,583	283,183		1,473,766	1차
2. 응집기축 스터핑박스 수리	12,498,785	6,615,450		19,114,235
3. 유해화학물질 취급설비 정비	4,464,787	2,953,354		7,418,141
4. 공동구 환기구 재도장	54,586	446,637		501,223
5. 송수펌프 에어챔버 드레인 배관 개선	406,021	603,709		1,009,730
6. 송수관 에어챔버 퇴수배관 신설 및 폴리아민 주입펌프 교체	2,960,804	13077015		16,037,819
1. PAC약품저장탱크 퇴수배관 교체 및 1, 2계열 약품투입이젝터 구내용수배관 교체	4,702,738	6,7778,38	0	11,480,576	2차
2. 3,4계열 PAC약품투입기 정비	0	705,648	0	705,648
3. 이산화탄소 용해수 급수펌프 정비	465,372	113,662	0	579,034
4. 오존발생기 고압휴즈 구매	7,718,000	0	0	7,718,000
5. 고도정수처리시설 에어커튼 설치	5,539,332	2,646,180	0	8,185,512
6. 고도정수처리시설 방충망 설치	5,225,070	4,466,370	261120	9,952,560
7. 가성소다 저장탱크 주입배관 점검 및 조치	772,022	2,991,236	130560	3,893,818
8. 탈수기 베어링 교체	6,289,078	837,957	0	7,127,035
9. 탈수기동 사무실 환기설비 설치	2707920	1,689,759	0	4,397,679
10. 농축조 슬러지 주입펌프외 1개소 점검 및 조치	970,266	0	0	970,266
11. 여과지동 및 송수펌프동 방충망 보완정비	3,686,976	2,999,000	0	6,685,976
계	59,652,340	47,206,998	391,680	107,251,018

◯ 2차 설계변경(작업지시 3)

공 종	재료비	노무비	경비	계	작업지시
1. 여과지동 출입 에어커튼 설치	11854872	4868952	0	16,723,824	3차
2. 유해화학물질 취급배관 지적사항 정비	2000000	705648	0	2,705,648
3. 4계열 여과지 역세송풍기 1대 부품 교체	10584720	1234884	0	11,819,604
4. 활성탄 흡착지 차염 투입설비 설치	4981543	1815698	0	6,797,241
5. 1,2,3,4계열 여과지동 방충망 보완	3334170	1574475	0	4,908,645
6. 급속공기밸브 교체 설치	1153406	534335	65280	1,753,021
7. 활성탄흡착지 배기팬 교체 설치	934982	1411296	0	2,346,278
8. 탈수기동외 1개문소 기계설비 교체정비	160332	35742	0	196,074
9. 슬러지 이송펌프 기계부품 교체정비	550656	0	0	550,656
계	35,554,681	12,181,030	65,280	47,800,991

□ 주요 변경내역(2020년 금차)

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 공종 변경에 따른 물량 반영 변경 금액
1	재료비	73,851,140	95,207,021	증)21,355,881
2	노무비	75,745,560	64,079,682	감)11,665,878
3	공사 경비	728,822	456,960	감)271,862
○ 제경비 감액
2	산재보험료, 고용보험료, 산업안전관리비 기타경비 요율에 맞게 적용	17,247,963	17,273,353	증)25,390
3	건강보험료, 연금보험료, 노인장기보험료 자료 제출치 않아 감액	6,560,147	0	감)6,560,147
4	일반관리비, 이윤 요율에 맞게 적용	26,066,487	23,183,103	감)2,883,384
계				0

□ 세부 공사비 증감

구 분		총 차			1차(2020. 4. 1 ~ 12. 31)		2차(2021. 1. 1 ~ 3. 31)
		당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	당 초	변 경
순공사원가	재료비	74,147,381	95,503,262	증)21,355,881	73,851,140	95,207,021	296,241	296,241
	노무비	91,742,220	80,076,341	감)11,665,879	75,745,560	64,079,682	15,996,660	15,996,660
	경 비	28,137,214	21,330,595	감)6,806,619	24,536,932	17,730,313	3,600,282	3,600,282
	소 계	194,026,815	196,910,198	증)2,883,383	174,133,632	177,017,016	19,893,183	19,893,183
일반관리비		11,641,607	11,814,610	감)173,003	10,448,017	10,621,020	1,193,590	1,193,590
이 윤		18,639,697	15,583,311	감)3,056,386	15,618,470	12,562,083	3,021,227	3,021,227
총원가		224,308,119	224,308,119		200,200,119	200,200,119	24,108,000	24,108,000
부가세		22,430,811	22,430,811	-	20,020,011	20,020,011	2,410,800	2,410,800
도급비		246,738,930	246,738,930	-	220,220,130	220,220,130	26,518,800	26,518,800

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경사항 : 변동사항 없음

○ 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	224,308,119	224,308,119	-
부가가치세	22,430,811	22,430,811	-
도급금액	246,738,930	246,738,930	-

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자 하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

□ 2020년 작업 완료한 사항에 대해서는 2020년 말까지 정산 및 대가(기성집행)지급코자 하며,

□ 예상치 못한 기계고장 등으로 추가 공종 지속발생하고 있으나 1차, 2차 계약금액 범위내에 유지보수 추진

◯ 예산 집행계획

구 분	당 초	변 경	증감액	비 고
총차금액 (2020년～2021년)	246,738,930	246,738,930	0
1차 금액 (2020년도분)	220,220,130	220,220,130	0
2차 금액 (2021년도분)	26,518,800	26,518,800	0

붙  임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 작업지시서(3차) 1부.

3. 계약금액검증확인서  1부.

4. 산업안전관리비검토결과서  1부.  끝.