문서번호	교통운영과-19743
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
교통전문관		광화문광장교통대책팀장	교통운영과장
백바름		이유국	12/21 代최재욱
협조

새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과 예측분석 용역 2차 계약 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12

교 통 운 영 과

새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과 예측분석 용역 2차 계약 시행계획

새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과 예측 분석 용역 장기계속계약에 따른 2차 계약 시행계획을 보고 드림

□ 추진근거

○ 새로운 광화문광장 재구조화 교통 모니터링 및 시행효과 예측 분석 계획(교통운영과1927(2019.8.28.)호)

○ 교통모니터링 및 시행효과 예측분석 용역 계약변경 시행(교통운영과18178(2020.11.24.)호)

□ 추진경위

○ 2020.03.25. 용역 계약 (장기계속 ’20.3.25∼’22.2.28, 1차 ’20.3.25∼12.31)

○ 2020.11.27. 1차 용역 계약변경 (1차 용역 추가과업 및 금105백만원 증액)

○ 2020.12.31. 1차 용역 준공신고 (1차 용역 준공일자 ’20.12.31)

□ 사업개요

장계계속계약에 따라 ’20년 1차 용역 준공 및 ’21년 2차 용역 계약 추진

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링 및 시행효과(Impact Analysis) 예측분석 용역(2차)

○ 과업규모 : (직접)광화문광장 사업 시행지, (간접)녹색교통진흥지역

○ 시행목적 : 광화문광장 조성으로 시민 편익 및 공익 증대의 객관적 평가와 조사 분석 및 모니터링을 통한 교통개선대책 마련

○ 과업기간 : (2차)’21.1.1∼’22.2.28, (총차)’20.3.25∼’22.2.28

- 광화문광장 사업 전·중·후의 조사, 분석 및 모니터링으로 사업완료 후까지 추진

○ 용역비용 : 금191,782,500원 (금일억구천일백칠십팔만이천오백원)

- 총차 계약금액 금596,782,500원 중 금405,000,000원(1차 용역금액) 집행

구 분	용 역 기 간	소 요 예 산
총 차	’20.3.25 ∼ ’22.2.28	금596,782,500원
1 차	’20.3.25 ∼ ’20.12.31	금405,000,000원
2 차	’21.1.1 ∼ ’22.2.28	금191,782,500원

□ 2차 용역 사업내용

《1차 용역 사업내용》

1. Impact Analysis를 활용한 광화문광장 조성 시행효과 예측

광화문광장 조성 시행효과 분석을 위한 교통·사회·경제측면 지표 선정

시행효과 지표 관련 빅데이터 DB 마련 및 Impact Analysis 기술 개발

Impact Analysis 기술을 활용한 시행효과 예측 및 사업 타당성 분석

2. 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링(전중·후) 및 개선대책 수립

광화문광장 조성 교통모니터링 지표 선정 및 공사전 교통현황 조사·분석

「새로운 광화문광장 조성」 교통안전시설 심의(시경) 관련 설계 및 분석

□ Impact Analysis를 활용한 광화문광장 조성 시행효과 예측

○ Impact Analysis 관련 평가지표 시각화 방안 및 사업 시행효과 종합분석

○ 1차 용역 결과를 바탕으로 광화문광장 조성 주변 중·장기 교통대책 방향 수립

○ 녹색교통진흥지역 목표 달성을 위한 광화문광장 조성의 기여도 분석

□ 광화문광장 조성에 따른 주변지역 교통 모니터링(시행 중·후) 및 개선대책 수립

○ 광화문광장 동측도로 조성 공사 전·중·후 교통상황 조사 및 비교분석

**********************************************************************************

*******************************************

○ 광화문광장 동즉도로 조성공사 교통민원 지점별, 유형별 검토․분석

○ 광화문광장 주변 교통현황 모니터링 조사·분석 결과에 따른 교통대책 수립

○ 광화문광장 주변 생활도로 보행환경 개선의 교통정온화 방향 수립

□ 향후계획

○ ’20.12월 말       1차계약 준공 및 2차계약 의뢰

○ ’21. 2월 말       2차용역 착수보고

붙임  2차 용역 설계내역서 1부. 끝.