“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 2차 시행(기계설비 보수공사(장기계속계약))

우리 정수센터에서 시행중인 『2020년 강북아리수정수센터 기게설비 보수공사(장기계속계약)』에 대하여 아래 같이 설계변경(정산)2차를 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2020년 강북아리수정수센터 기계설비 보수공사(장기계속계약)

2. 도 급 자 : 에이치알티에스㈜ 대표 이은실

3. 계 약 일 : 2020. 03. 20.

4. 공사기간 : 2020. 04. 01 ~ 2021. 03. 31.

마. 설계변경(정산)내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총차	공급가액	224,308,119	224,308,119	-
	부가가치세	22,430,811	22,430,811	-
	도급금액	246,738,930	246,738,930	-
	결정금액	246,738,930	246,738,930	-
1차 (2020.4.1.~2020.12.31.)	공급가액	200,200,119	200,200,119	-
	부가가치세	20,020,011	20,020,011	-
	도급금액	220,220,130	220,220,130	-
	결정금액	220,220,130	220,220,130	-
2차 (2021.1.1.~2021.3.31.)	공급가액	24,108,000	24,108,000	-
	부가가치세	2,410,800	2,410,800	-
	도급금액	26,518,800	26,518,800	-
	결정금액	26,518,800	26,518,800	-

바. 변경사유 : 기계설비 유지관리 하는 동안 다양한 공종의 보수 수요 발생으로 공                    종 추가, 2차 작업 정산.

사. 예산과목 : 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 1. 설계변경심의결과보고  1부.

2. 변경설계내역서  1부.

3. 계약금액조정 검증확인서  1부.

4. 산업안전관리비 검토결과서  1부.

5. 고용산재보험완납증명서  1부.

6. 산업안전관리비 사용내역서  1부.

7. 합의서  1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	임근식		정수시설과장	백상희		강북아리수정수센터소장	12/21 代최진경
협조자	주무관	김금옥
시행	정수시설과-3842	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화	0231465873	/전송		/		/	부분공개(5)