투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(하남선1-2공구 건설사업관리용역, 총괄7회)

우리본부에서 시행중인『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

다. 변경계약 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증․감		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총괄 7회	’15.3.13~ ‘20.12.31	2,709,328	’15.3.13~ ‘21.6.30	2,843,866	증)181일	증)134,538

라. 변경사유

○ 본 공사 절대공기 부족에 따라 건설사업관리용역 준공기한 연기

마. 예산과목

○ 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 광역철도건설사업, 하남선(5호선 연장), 광역철도건설, 감리비

붙 임 : 검토보고서 등 관련 자료 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	엄상민		토목1과장	최진규		도시철도토목부장	12/21 최병훈
협조자	주무관	서재원		주무관	유원하
시행	도시철도토목부-13670	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개