코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 변경계약 의뢰

1. 관련문서

가. 재난관리과-7709(2020.12.24.)호『긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 설계변경 보고』

나. 소방행정과-12532(2020.12.8.)호『은평소방서 역촌119안전센터 긴급출동신호제어시스템 설치 공사 계약 체결 결과 보고(통보)』

다. 재난관리과-7249(2020.12.4.)호『긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 계획 보고』

라. 재난관리과-6975(2020.11.25.)호『긴급출동신호제어시스템 설치 계획』

2. 긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 설계변경되어 다음과 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 은평소방서 역촌119안전센터 긴급출동신호제어시스템 설치 공사

나. 대    상 : 역촌119안전센터 청사 앞

다. 공사업체 : 새한전설 주식회사(대표자 이수정, 은평구 증산로 327)

라. 공사기간 : 2020. 12. 7. ~ 2021. 1. 4.

마. 공사금액 : 금35,000,000원(금삼천오백만원)

※ 금액 변동 없음

바. 변경사유 : 현장여건 변동으로 물량변경 발생

사. 변경내용

1) 당초 설계상 누락된 제어기 부분품 및 교통정리요원 반영

2) 안전사고 예방을 위한 가공 케이블 설치 위치 변경으로 공종 및 물량 변경

3) 은평구 도로점용 굴착·복구 허가 원인자 승인으로 인한 굴착 복구비 반영

4) 금액변동으로 간접비 차액이 발생하여 간접비 정산

붙임  1. 긴급출동신호제어시스템(교통신호기) 설치 공사 설계변경 보고 1부.

2. 검토의견서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 도면(변경 전) 1부.

5. 도면(변경 후) 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김형진		재난관리과장	12/24 代배철수
협조자
시행	재난관리과-7711	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6044	/전송	02-6981-6018	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(6)