시  민

문서번호	시설관리과-22098
보존기간	년
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

주무관	시설안전팀장	시설관리과장
주세진	김성호	12/24 이승완
협 조

설계변경 심의위원회

개최 결과보고

【2020년 북부수도사업소 강북구관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)-1차】

2020. 12. 24.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

『2020년 북부수도사업소 강북구관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)』에 대하여 처리물량이 변경됨에 따라 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의완료하고 그 결과를 보고드림.

1. 일 반 현 황

가. 용 역 명 : 2020년 북부수도사업소 강북구관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

나. 용역개요 : 폐기물운반   1,370㎥, 폐기물처리  3,024 톤

다. 용역기간 : 2020.6.24. ~ 2021.6.30.

라. 용 역 비 : 99,266,500원

바. 도 급 자 : 제일이앤디(주) 대표 김대환

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2020년 12월 24일(목) 11:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 위 원 장 : 시설6급 박미영

라. 심 의 자 : 시설6급 김성호, 시설6급 김정훈, 시설7급 이한수

3. 심 의 내 용

○ 계약물량 증·감에 대한 설계변경 사항으로 단가계약 용역의 특성상 발생

가. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

나. 계약변동 (증ㆍ감)수량 단가 낙찰률 적용범위 내 적용 적정여부 등

4. 설계 금액 변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감액	비 고
총용역비	99,266,500	99,266,500	-
1차수	59,552,000	33,872,000	감)25,680,000	2020.6.24.~12.31.
2차수	39,714,500	65,394,500	증)25,680,000	2021.1.1.~6.30.

5. 차수별 변경 세부내역

구 분	1차		증·감액	2차		증·감액
	변경 전	변경 후		변경 전	변경 후
총용역비	59,552,000	33,872,000	감) 25,680,000	39,714,500	65,394,500	증) 25,680,000
운반비	19,201,188	11,164,131	감) 8,037,057	12,800,547	20,837,604	증) 8,037,057
처리비	34,936,994	19,628,596	감)15,308,398	23,303,544	38,611,942	증) 15,308,398
부가가치	5,413,818	3,079,273	감) 2,334,545	3,610,409	5,944,955	증) 2,334,545

6. 행 정 사 항

○ 설계변경 심의 검토결과를 반영 설계변경 방침 후 재계약 의뢰하고자 함

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의 결과서 1부  끝