“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	[뚝도정수센터 탈수설비 개량 전기공사]설계변경 시행 및 변경계약의뢰

1. 기전설비과-12134호(2020.12.24.) 관련입니다.

2. 뚝도정수센터 탈수설비 개량 전기공사의 설계변경을 시행하오니 변경계약 해주시기 바랍니다.

가. 변경대상 : 뚝도정수센터 탈수설비 개량 전기공사

나. 변경사유 : 공사물량 변동 및 보험료 정산 등

다. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비

라. 변경내역

구 분	당초	변경	비고
계약기간	’20.7.1.∼’20.12.28.	(변경없음)
계약금액	231,452,780원	231,973,000원	(증) 520,220원

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부

2. 설계변경 심의결과 2부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 설계변경 합의서 1부.  끝.

	생산부장
주무관	김인준		기전설비과장	최강욱		생산부장	12/24 서대훈
협조자	주무관	채창옥		예산팀장	代손인숙
시행	기전설비과-12140	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)