투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 공시기간 연장 요청

1. 서울시 도시기반시설본부 설비부-12355(2020.8.21.)호와 관련입니다

2. 위 문서와 관련하여 「세종대로 도로공간 개편 사업 전기공사」의 교통안전 시설물(신호등) 원인자 부담공사 기간연장을  아래와 같이 승인요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 세종대로 도로공간 개편 사업 전기공사

나. 공사기간 : 2020.7.1. ~ 2021.5.31.

다. 공사내용 : 신호등 이·신설

라. 공사장소 : 시청교차로 외 7개소

마. 원 인 자 : 서울특별시 도시기반시설본부

바. 변경내용

공 종	설 계 및 감리사	시공사	연장기간		연장사유
			변경전	변경후
신호등 이·신설	㈜트래픽스	케이엘디 ㈜	승인통보일 ~ ＇２０.12.31.	승인통보일 ~ ‘21.5.31.	사업기본계획 변경에 따른 공종내역 및 물량조정

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	12/30 代여인웅
협조자
시행	설비부-21299	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)