문서번호	도시철도토목부-13181
결재일자	2017.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조규양		최진규	10/12 김진팔
협조	송변전과장		김영수
	주무관		한재호

『하남선(5호선 연장) 기존구조물 철거에 따른 시설물 이설 관련』

현장조사 및 회의 결과

2017. 10.

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 기존구조물 철거에 따른 시설물 이설 관련』

현장조사 및 회의 결과

하남선(5호선 연장) 1-1공구 기존 노선 연결구간 구조물 철거에 따른 시설물 이설 관련 현장조사 및 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 개    요

○ 현장조사

- 일    시 : ‘17.09.26.(화) 01:30~03:00

- 조사구간 : 기존5호선 입출고선(하남선 접속구간)

- 조사내용 : 이설 대상 시설물, 이설 위치 조사 등

- 참 석 자

· 본  부 : 토목, 송변전, 신호, 정보통신, 시설전기, 설비계획 업무담당

※ 시스템 실시설계 용역사 분야별 담당

· 서울교통공사 : 전기, 신호, 정보통신, 기계분야 업무담당

· 현  장 : 하남선1-1공구 업무담당 및 건설사업관리

궤도1공구 현장대리인, 건설사업관리자

○ 검토회의

- 일    시 : ‘17.09.27.(수) 10:00~

※ ‘17.09.21. 1차회의시 현장확인 후 2차회의 일정 결정

- 장    소 : 하남선1-1공구 현장상황실

- 회의안건

· 이설시설의 종류, 이설 방법, 주체, 시기 등 검토

- 참 석 자

· 본  부 : 궤도과장, 도철토목부·설비부 분야별 담당

· 서울교통공사 : 전기, 신호, 정보통신, 기계 분야별 담당

□ 회의내용

〔이설시설의 종류〕 ※ 본부(도철 토목부, 설비부), 교통공사, 시스템분야 설계용역사 확인

○ 전등선로(1열), 신호/통신 선로(3열), 고압전선(1열), 인접 신축건물 설치

계측기, 변전소연락차단선로, 기타 시설물 단자함

현황	이설(안) ※ 이설 위치에도 기존 시설물 존치

〔이설공사〕

○ 설계업무지원〈도시철도설비부〉, 공사 및 감리〈도시철도토목부〉, 기술업무지원〈서울교통공사〉

〔이설방법〕

○ 설계결과에 따라 이설하고 신설 연장되는 하남선과 연계 필요〈도시철도설비부〉

○ 전기, 신호, 통신 분야 시공에 대한 감리 필요〈서울교통공사〉

○ 조기개통 및 ‘18년 수방 전 완료하여야 하는 시급성을 감안 조기 이설하는 방안 검토〈도시철도토목부〉

□ 조치계획

○ 현재 기존5호선 연결부 공사가 토공 및 가시설공이 진행중으로서, ‘18년 수방을 위하여 우기 전 구조물을 완료하여야 하는 실정이므로,

※ 공사중 침수 방지대책 수립 요구(‘17.09.26., 서울교통공사)

○ 조속히 이설공사를 추진하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

현장조사 및 회의 사진

끝.